문서번호	도로보수과-2553
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	03/19 이학구
협 조
	주무관			이상하

「‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(전체2회, 2차 1회) 검토보고

2019. 3.

서부도로사업소

(도로보수과)

「‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)」

설계변경(전체2회, 2차 1회) 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 『‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 ‘19.03.15.일자로 제설대책기간이 종료됨에 따라 제설작업 용역 설계변경(전체2회, 2차1회)을 검토하고 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

□ 제설대책 추진에 따른 예산 재배정[도로관리과-1880(‘19.1.31.)호]

Ⅱ		용역개요 및 예산현황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘18/’19 제설작업 용역(장기계속)

○ 용역기간 : ‘18.11.15.~’19.03.15.(121일)

- 1차분 : ‘18.11.15.~’19.12.31.(47일)

- 2차분 : ‘19.01.01.~’19.03.15.(74일)

○ 용 역 비 : ***************

- 1차분 : *************

- 2차분 : **************

○ 계 약 자 : 위상건설㈜(대표 : 마용철)

□ 예산배정현황

(단위 :천원)

예산과목		예산액	배정일
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비	36,000	‘19.01.31.

Ⅲ		변경내용 및 조치계획

□ 사업비 변경내용

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
*****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	*	****
*****	***********	***********	***********

□ 설계변경 사유

○ 비상근무 발령에 따른 공정별 물량 증ㆍ감 정산

- 비상발령 횟수 : 총 15회(보강 11회, 1단계 3회, 2단계 1회, 제설작업 6회)

▸ 1차분 : 총 5회(보강 3회, 1단계 2회, 2단계 0회, 제설작업 3회)

▸ 2차분 : 총 10회(보강 8회, 1단계 1회, 2단계 1회, 제설작업 3회)

- 2차분 공정별 물량 증ㆍ감 현황

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	**	**	*	**
	야간	hr	**	**	*	*
상황대기원	야간	일	**	**	*
제설작업원	주간	hr	**	***	*	***
	야간	hr	**	***	*	**
제설작업운전원	주간	hr	***	***	*	**
	야간	hr	***	***	*	**
제설장비 상시대기	덤프(15톤)	hr	*	*	*	*
제설작업	덤프(15톤)	hr	*	*	*	*
제설장비 상시대기	굴삭기(0.6[eqn: m ^{3}])	hr	***	***	*
제설작업	굴삭기(0.6[eqn: m ^{3}])	hr	**	****	*	****
덤프트럭(월임대)유류비		hr	***	***	*	***
제설 상황실	3[eqn: m]*9[eqn: m]	동	*	*	*
덤프트럭 월임대	15톤 덤프	월	***	***	*

※ 1차 정산분(‘18.12.16.) 이후 ’18.12월 비상근무로 발생된 용역비 정산금액을 2차분에 포함하여 정산처리

□ 조치계획

○ 상기 검토보고 내용과 같이 비상근무 발령에 의거 공종별 실제 근무한 사항에 대하여 정산을 실시하고 그 결과를 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 1. 예산재배정 공문 2부.

2. 설계변경내역서(총차분, 2차분) 2부.  끝.