문서번호	정수시설과-880
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	03/20 서대훈
협 조
	주무관			김수영

여과지동 내부바닥 정비공사 계획

2019. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

여과지동 내부바닥 정비공사 계획

우리정수센터 여과지동 내부 바닥이 노후되어 시민 고객 견학 시 정수센터 이미지를 저해하고 있어 아리수 생산시설을 개선하고자 함

1		현 황

□ 추진근거

○ 여과지동 시설 정비 및 청소방안 개선 계획 : 정수과-1465(2018.4.6)

- 노후되고 지저분한 내부바닥 개선(연마 및 광택)

- 깨끗한 환경 이미지 필요

□ 시설현황

○ 건물현황 : 여과지동 2개동(1~4계열)

○ 건축년도 : 1999.9.30

○ 규    모 : 48.6m×159m×2개동

○ 현황 사진

□ 검토내용

○ 센터별 사례

광암(화강석:2012년)	암사(화강석 : 2018년)	구의(화강석 : 2010년)
뚝도(테라조)	영등포(에폭시)	강북(테라조)

○ 1안

- 방 법 : 자연석판석(화강석)

- 센 터 : 광암, 암사, 구의

- 장 점 : 광택이 아름답고 내구성이 강하며 오염이 별로 없다

- 단 점

․가격이 비싸서 여과지동 1계열만 정비 가능

․우리센터는 자연석 판석을 설치할 경우 바닥이 여과지 항 경계 턱

보다 높아져 턱 인상을 하여야 하나 방법이 어렵고 조잡시공 우려됨

○ 2안

- 방 법 : 연마 및 광택

- 센 터 : 뚝도, 강북

- 장 점 : 가격이 저렴하여 여과지동 전계열(1~4계열)가능

- 단 점 : 광택이 오래가지 못함(20년 노후된 테라조)

※ 지속적인 청소 및 유지관리 필요

□ 검토결과

○ 자연석 판석(화강석)시공은 광택이 아름답고 내구성이 강하나 고가로서 여과지 1계열만 설치가 가능하고 시공방법이 어려워 조잡시공의 우려가 있어 제외하고

○ 가격이 저렴하여 전계열(1~4계열) 정비가 가능하고 광택이 오래 지속될수 있도록 유지관리를 시행하면 깨끗한 환경조성이 가능하여 연마 및 광택으로 정비고하자 함

※ 유지관리 방안

- 여과지동 전동청소기 물품 구매완료 : 4대 (정수과)

- 청소장비 운영 : 행정관리과 공무직 직원 활용

정비전	바닥 연마	바닥연마
바닥광택	정비완료	청소 장비 구매

○ 바닥정비(예시)

2		추진 계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 여과지동 내부바닥 정비공사

○ 사업내용 : 여과지동 바닥 연마 및 광택(1~4계열)

○ 사업기간 : 2019. 4 ~ 9.

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

□ 발주방법

○ 발주방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리면허업을 소지한 업체로 입찰일 현재 주된 영업소가 서울시 및 경기도에 소재한 업체

□ 추진일정

○ 설계심사요청(본부 안전총괄과) : 2019. 3. 20

○ 공사발주 : 2019. 3. 25 ~ 3. 27.

○ 계약 및 착공 : 2019. 4.

○ 준 공 : 2019. 9.

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 여과지동 상세도(1계열) 1부.  끝.