문서번호	자원관리과-3672
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비관리팀장	자원관리과장		서울종합방재센터소장
장순성	배미순	조규관		03/20 김학준
협 조
	종합상황실장		고숭
	조직경영팀장		서영배
	전산통신과장		윤기응

119상황요원 위생관리 강화로
상황대응능력 향상을 위한 종합상황실 등 바닥환경 개선 계획

서울종합방재센터

[자원관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상황대응능력 향상을 위한 종합상황실 등 바닥환경 개선 계획

119종합상황실 등의 바닥재를 교체하여 실내먼지 발생 최소화 및 쾌적한 근무환경 조성을 통해 상황요원의 위생관리를 강화하고 상황대응능력을 향샹시켜 119 대시민 안전 서비스의 품질을 높이고자 함

1		관 련 근 거

□ 종합상항실-1618(2019.2.18.)호 「서울종합방재센터 상황대응능력 종합개선 계획」

□ 자원관리과-648(2019.01.15.)호 「2019년 서울종합방재센터 청사관리계획」

□ 자원관리과-8374(2018.07.13.)호『서울종합방재센터 감정노동 종사자 보호 매뉴얼』

2		현황 및 문제점

현 황

종합상황실 및 구급상황관리센터 현황

문제점

□ 종합상황실 내부 주요 통로 단차로 인한 이동시 안전사고 발생 우려

□ 현 바닥재(카펫)는 노후․실내먼지 퇴적으로 상황요원 호흡기 건강문제 야기

□ 기존 바닥재 설치 후 오래시간 경과로 바닥 레벨 불일치 및 오염 누적, 쾌적 환경 유지가 어려움

3		세부추진계획

구 분		공사내용
·종황상황실 (540㎡) ·계단 (종합상황실↔구급상황관리센터)		○ 바닥재 철거 - 기존 카펫 철거 ○ 바닥재 설치 - 평탄화 및 이물질 제거 - OA타일 부착 ○ 슬로프 설치 - 종합상황실(상황실 내부 주요 통로)
·구급상황관리센터 (270㎡) 및 소장실 (82㎡)		○ 바닥재 철거 - 기존 카펫 철거 ○ 바닥재 설치 - 평탄화 및 이물질 제거 - OA타일 부착

4		예산조치 계획

예    산 : 금45,000천원

예산과목 : 재난관리시스템 및 인프라 구축/서울종합방재센터 운영/119종합상황실 유무선통신시스템운영/공공운영비

구 분			소요 액(원)	비고
세부사업	통계목	사업명	45,000,000
119종합상황실 유무선 통신시스템 운영	공공운영비 (201-02)	상황대응능력 향상을 위한 종합상황실 등 바닥재 교체 계획	45,000,000

※ “무선영상시스템 및 소방관서 통신 유지관리비 집행잔액” 활용

5		계약추진

1		계약방법

1인견적 수의계약(전자수의 시담)

관련근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장(수의계약 운영요령)

□ 지방계약법 제9조(계약의 방법)

□ 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 마목(수의계약에 의할 수 있는 경우)

제25조 제1항 제5호 마목

추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」   제2조 제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」제2조 제2호에 따른    장애인기업과 체결하는 계약.

2		추진일정표

과업내용	과업기간	2019년
		3월				4월
기본계획 수립 및 계약체결	3. 19. ~ 3. 22.
공사 착공 및 준공	3. 25. ~ 4. 03.
완수검사 및 대금지급	4. 04. ~ 4. 12.

6		기대효과

□ 종합상황실 바닥 레벨 평탄화 및 안전슬로프 설치로 안전사고 예방

□ 기존 바닥재인 카페트를 OA타일로 교체하여 비산먼지 최소화

□ 상항요원의 호흡위생관리 강화 및 청결하고 쾌적한 근무환경 조성

□  상황대응능력 향상으로 119 대시민 서비스 품질 향상.  끝.