문서번호	도시재생과-2209
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	캠퍼스타운조성TF담당	도시재생과장	도시재생기획단장		부구청장	구청장
김경화	이태기	서형석	김화복		손정수	03/20 이승로
협 조

- 안암동 캠퍼스타운의 청년 창업·문화 활력의 중심가로-

참살이길 스마트가로등 구축 및 포털 서비스 구축사업 계획

2019. 03.

도시재생기획단

(도 시 재 생 과)

- 안암동 캠퍼스타운의 청년 창업·문화 활력의 중심가로-

참살이길 스마트가로등 구축 및 포털 서비스 구축사업

안암동 캠퍼스타운 시범사업의 중심가로인 참살이길에 대학가 특성을 부여하고, 가로환경 개선과 연계한 문화공간 조성, 창업기반 인프라 구축을 위한 「참살이길 스마트가로등 구축 및 포털 서비스 구축사업」을 추진하고자 함

Ⅰ				추진근거

청년일자리 창출을 위한 캠퍼스타운 조성 추진계획(서울시장 방침 제78호)

2017년 안암동 캠퍼스타운 추진계획(서울시 시설계획과-1707호)

- 안암동 캠퍼스타운 활성화계획 수립용역 (2017.12.)

안암동 캠퍼스타운의 청년 창업·문화활력의 중심가로 「스마트 스트리트 조성사업」추진계획(서울시 시설계획과-7957호)

Ⅱ				추진경과

‘16.09  ~ ’17.12  안암동 캠퍼스타운 활성화계회 수립

‘17.09.26          기술용역타당성 심사 완료(서울시 기술심사담당관)

‘17.11.03~12.04  입찰공고 및 입찰 재공고

‘17.12.18          안암동 스마트스트리트 조성 기본 및 실시설계 용역 계약

‘18.02.13.         착수보고회 개최

‘18.03.16~03.30 지역관계자(주민 및 상가 등) 및 통행자 설문조사 실시

‘18.07.24.         주민설명회 개최(1차)

‘18.11.14          가로조성 공사 발주(토목공사 분야) 및 계약(435,567천원)

‘18.11.21          기본 및 실시설계 용역 관련부서 업무협의

‘18.12.05     가로조성 공사 설계변경(1차) : 497,225천원

‘18.12.13     주민 및 캠퍼스타운사업 관계자 등 설명회 개최(2차)

‘18.12.21     용역 최종보고 및 준공

‘19.02.12     서울시 스마트도시정책관 협의(데이터 관련 공유협의 요청)

‘19.02.27     서울시 스마트도시정책과 협의(지능형 CCTV관련 사항 협의)

Ⅲ				사업개요

사 업 명 : 안암동 캠퍼스타운 참살이길 스마트가로등 구축 및 포털서비스 구축 사업

사업기간 : 2019.03.~2019.11.

과업구간 : 성북구 고려대로 24길(안암역~안암오거리 L=400m, B=12m)

계약방법 : 협상에 의한 계약(제한경쟁입찰)

소요예산 : 약 1,800백만원

❍ 스마트가로등 구축 : 800백만원

- 스마트가로등 19개 설치, 관제클라이언트구축 및 영상정보분석 구축

(지능형 CCTV,디스플레이,센서, 컨트롤러 장비 포함)

❍ 포털서비스 구축 : 1,000백만원

- WEB/WAS서버 2식, DB서버1식, 검색/리포팅서버, 키오스크, 소프트웨어 서버 등

예산과목

❍ 지역균형발전개발, 효율적인도시개발계획 및 관리, 2018년 고려대 안암동

캠퍼스타운 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비 : 1,040백만원(시비, 명시이월)

(당초 명시이월비는 안암동 캠퍼스타운 거점센터 조성사업 추진에 사용하고자 했으나 본 사업에 먼저 집행하고자 함)

❍ 경제정책실 캠퍼스타운활성화과, 캠퍼스타운활성화, 캠퍼스타운조성,

안암동 캠퍼스타운 추진, 자치단체경상보조금 : 760백만원(시비)

Ⅳ				사업추진방향

스마트가로등으로부터 수집한 지역기반 또는 지역중심 데이터 활용으로 창업중심의 캠퍼스타운 리빙랩 구축

❍ 창업, 생활, 안전, 소비 등의 정보 수집 및 제공을 위한 가로 내 장비를 통해 이용자별(방문자,지역주민,상인 등) 맞춤 정보 제공

❍ 참살이길 이용 현황에 대한 실질적인 데이터 확보를 통해 지역에 기반한 창업 아이템 발굴 확대

❍ 가로 내 스마트 장비를 통한 정보 수집, 가공, 홍보를 통해 안암동 캠퍼스타운사업 구역 내에서 창업▷개발▷피드백▷시제품제작▷지역 사용자 평가 및 홍보▷지역경제 활성화에 이르는 창업 중심의 캠퍼스타운 리빙랩 실현

※리빙랩 : 생활공간에서의 실험(연구실)이란 의미로 사용자들의 행동을 실시간으로 생활공간 내에서 파악하고 사용자들이 기술 및 서비스 개발 등 혁신활동에 적극 참여가능한 사용자 주도형 혁신 생태계를 의미함.

청년층 창업 아이디어와 문화가 교류하는 공간 조성

❍ 기 조성된 청년 창업스튜디오 인프라와 스마트가로등과 연계한 창업 아이디어 교류 공간 조성

❍ 창업자들의 유입으로 대학가의 새로운 창업 문화 공간으로 유도

지역·학교·상점 홍보를 통한 지역 및 상권 활성화 유도

❍ 스마트가로등을 통한 주변 상권의 홍보 및 이용객들을 위한 정보 제공을 통한 참살이길 활성화 기대

❍ 지역 정보, 구정 정보 등 홍보를 통한 여러 계층의 외부 인구를 유입하여 지역과 상권활성화 유도

Ⅴ				세부추진내용

1	추진방법

사업진행 절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 심사	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

입찰방법 : 제한경쟁입찰

계약방법 : 협상에 의한 계약

입찰참가자격

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰참가자격) 및 동법 시행규칙 14조(입찰참가자격 요건의 증명)에 경쟁 입찰 참가 자격이 있는 자로서 아래 조건을 갖추어야 함

❍ 아래 1), 2)를 모두 갖춘 업체는 단독입찰 가능하며, 상호 보완을 위해 공동도급(분담이행방식)으로 참여 가능(최대 3개 업체 가능)

1) 참살이길 스마트가로등 구축

가. 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468)

나. 정보통신공사업자(업종코드:0036)

다. 전기공사업자(업종코드:0037)

2) 참살이길 스마트거리 포털 서비스 구축

가. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업, 업종코드:1469)

나. 산업디자인전문회사(환경디자인분야, 업종코드:4442)

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」규정에 의하여 다음의 직접생산증명서를 모두 소지한 업체만 가능

①직접생산(전산업무(소프트웨어개발),세부품명번호:8111159901,정보시스템개발서비스)

②직접생산(전산업무(소프트웨어개발),세부품명번호:8111200202, 빅데이터분석서비스)

③직접생산(공간정보 데이터베이스 및 시스템 구축, 세부품명번호:8115169901, 공간정보DB구축서비스)

2	세부과업내용

스마트가로등 디자인· 제작 및 정보 분석 시스템 구축

❍ 가로등(가로등주) 규격 및 기준에 따른 스마트가로등 디자인 및 제작·설치

❍ 스마트가로등의 지능형 CCTV 및 센서를 통해 수집된 정보 분석 소프트웨어 개발

❍ 지능형 CCTV의 영상정보와 성북구 관제시스템과의 연동 및 데이터 관리 방안 구축

서울시・성북구・고려대 데이터 공유 서비스 구축

❍ 각 기관별 데이터의 개방 및 공유 플랫폼 서비스 기반 구축

데이터 정보 관리 시스템 구축

❍ 스마트가로등을 통해 수집되는 다양한 자료를 기능 요구사항에 따라 재가공·정비하여 통합DB 구축을 위한 표준체계를 개발

❍ 향후 관리의 용이성 및 연계의 지속성을 위한 연계기술의 표준화

❍ 수집된 정보의 개인정보 및 다양한 정보 공개에 대한 보안성 검토

스마트거리의 지속가능성 및 확장성에 대한 방안 마련

❍ 스마트가로등의 발전 가능성에 대한 방안 및 확장성를 고려한 지속적인 정보 업데이트 방안을 모색 및 구축

❍ 현 과업 이후 정보제공 및 서비스 제공에 있어 전문화・고도화 작업이 용이할 수 있는 중장기적 관점의 시스템 구축 및 확장성 마련

각종 심의 및 협의사항 수행

❍ 본 용역에 앞서 선 수행 된 용역사와 협의과정을 통해 정확한 과업 수행 필요

❍ 스마트가로등의 디자인에 따른 디자인 심의 수행 및 기타 필요한 심의 등

기타 행정적 절차 수행

※  카테고리 및 주요 기능 등의 주요 과업 내용은 추후 변경될 수 있음

Ⅵ				향후계획

사전협의 및 보안성 검토 (홍보전산과 및 서울시 정보통신보안담당관 ) : ‘19.03.

서울시 계약심사 (서울시 계약심사과) : ‘19.03.

용역 입찰공고 및 제안서 평가위원회 개최·협상 : ‘19.03.~04.

용역 계약 및 사업시행 : ‘19.04.~‘19.11.

참고자료 : 스마트가로등 구축 및 데이터 서비스 제공 체계.  끝.

스마트가로등 구축 및 데이터 서비스 제공 체계

[참고자료]

스마트가로등 제작 및 설치 (지능형CCTV, 센서등) CCTV 및 센서를 통한 정보수집	⇨	영상정보분석 시스템 구축 데이터관리/보관영상 데이터 및 센서 정보분석	⇨	서비스 제공을 위한 포털 비스 구축 환경정보, 교통정보, 창업정보, 상권정보 등 제공 및 이용
스마트 가로등 구축 및 정보 분석				포털 서비스 구축

스마트 서비스 제공 체계

목표시스템 구성도

데이터 서비스 제공 흐름도

데이터정보 활용 방안(예)

수집장비 (스마트가로등)	수집데이터	데이터활용방안(창업가)	데이터활용방안(기타)
지능형CCTV	-유동인구량 및 혼잡도(시간대/구간별) - 유동인구 동선 -시설(상점 등) 이용 현황(출입자 수 및 체류시간 등) -(시간대/구간별) 통행 차량 정보 -가로의 쓰레기투기, 불법주정차 등	- 창업아이템의 마케팅 전략 수립 - 도·소매, 임대, 음식점업 등 각종 서비스 업종 창업 (창업활용 예시) - 광고 및 경영 컨설팅업 창업 - 가로 내 입점 위치 결정 - 가로 내 친구 위치 찾기 어플리케이션 개발 - 주차 안내 어플리케이션 개발	(이용자 및 주민) - 가로 및 상점 혼잡도 파악, 예측을 통한 의사결정 지원 (상 인) - 매장 운영 및 마케팅 전략에 활용 (예: 매장 운영시간 조정, 이용자 분석, 광고 및 홍보 전략 수립 등) (공 공) - 보행환경 개선 및 (대중)교통 정책 분석·평가·개선 등, 공공안전 및 치안확보, 불·위법 행위 방지 및 적발 (학 교) - 가로 이용자의 행태 분석·예측 등에 관한 각종 연구를 위한 기반 데이터로 활용 (관련 연구분야 – 경영학, 지리학, 통계학, 심리학, 산업경영공학, 도시공학, 건축학 등)
환경측정센서	-기온,습도, 미세먼지, 환경소음 등	- 생활가전· 환경 분야 제품 및 서비스 창업에 활용 [창업활용 예시] - 기온, 대기 중 미세먼지 농도, 대기 습도에 등에 따라 반응하는 가로용 스프링클러 - 주위 환경 소음에 따라 사용중인 이어폰의 볼륨을 자동으로 조정해주는 어플리케이션 개발 - 대기환경, 날씨 등에 따라 매장 공조장치, 매장 음악 등의 관제시스템	(상 인) - 매장 운영 전략에 활용(예: 매장 실내외 환경 조성 등) (공 공) - 도심 미기후 환경 모니터링, 평가 등을 통한 환경·보건·의료 정책 및 제도 개선 (학 교) - 지역 내 환경·기후변화 분석 및 개선방안, 도시민 건강, 에 관한 각종 연구를 위한 기반 데이터로 활용 (관련 연구분야 – 환경생태공학, 의공학, 생명공학, 공중보건학, 조경학, 화학공학, 건축학 등)
기타	홈페이지를 통한 개인정보, 열람 데이터 종류 등	이용자 대상의 다양한 창업 아이템 개발	이용자 성별, 나이, 직업별 서비스 이용 현황 등 분석