투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	'18/'19 제설작업 용역-서부(장기계속) 설계변경(전체 2회, 2차 1회) 시행

1. 도로관리과-1880(2019.1.31.)호 및 도로보수과-2553(2019.3.19.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『‘18/’19 제설작업 용역-서부(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체 2회, 2차 1회)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : ‘18/’19 제설작업 용역-서부(장기계속)

나. 용역기간 : 총차분 2018. 11. 01. ~ 2019. 03. 31.

(2차분 2019. 01. 01. ~ 2019. 03. 15.)

**********************************************

라. 계 약 자 : 위상건설(주) 대표 마용철

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

******		****	****	*****
****		***********	***********	***********
***	***	**********	**********	*
	***	***********	***********	***********

바. 설계변경 사유

- 1차 정산분(‘18.12.16.)이후 ’18.12월 비상근무로 발생된 용역비 정산금액을 2차분에 포함하여 정산 처리

- 비상근무 발령에 따른 공정별 물량 증･감 정산

사. 예산과목

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	배정일
도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리,제설대책추진,사무관리비	제설작업 용역비	360,000	‘19.01.31.

붙임 1. 방침서 1부

2. 설계변경내역서(총차분, 1차분) 2부

3. 예산 재배정 공문 2부

4. 합의각서(총차분, 2차분) 2부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
★주무관	정의현		주무관	이상하		도로보수과장	강종훈		서부도로사업소장	03/20 이학구
협조자	주무관	신오기
시행	도로보수과-2622	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	jam0215@seoul.go.kr	/	부분공개(6)