“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 요청[서울창업카페 교대점 인테리어공사 설계용역]

1.  투자창업과-2892(2019.3.19.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 『서울창업카페 교대점 인테리어공사 설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용  역  명 : 서울창업카페 교대점 인테리어 공사 설계용역

나. 계  약  자 : 스튜디오인로코 건축사사무소

다. 준공예정일

- 당초 : 2019.2.20. ~ 2019.3.21

- 변경 : 2019.2.20. ~ 2019.4.01

라. 귀책  소재 : 서울특별시(지체상금 부과여부 : 미부과)

마. 연기  사유 : 연기 의뢰서(붙임2) 참조

붙 임 1. 용역 준고기한 연기 방침서 1부.

2. 용역 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	투자창업과장
주무관	노은영		창업기반조성팀장	백명숙		투자창업과장	03/20 최판규
협조자
시행	투자창업과-2911	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 (무교동) 더익스체인지서울 7층	/
전화	02-2133-4879	/전송	02-2133-0882	/	knowsea@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다