문서번호	방재시설부-3904
결재일자	2019.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		조성만	03/21 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 가시설 중간파일 등 매몰처리 반영 검토 보고

2019. 3

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 가시설 중간파일 등 매몰처리 반영 검토 보고

시점부 개착BOX 가시설 중 중간파일 및 수평연결재의 간섭부 처리비용의 미반영 사항과 매몰처리 반영을 위한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 400m)

○ 공사기간 : '15.10 ~ '19. 4

○ 도 급 비 : 47,890백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링 외2

보고내용

○ 현장여건을 고려한 시점부 개착BOX 중간파일 및 수평연결재 간섭부 처리방안 검토

- 개착BOX 변경 시 중간파일 간섭부의 Block Out처리비용 미반영

- 보조파일 설치 및 중간파일 인발 시 복공상부에 도로점용이 필요하고, 보조파일 설치 시 상부슬래브 경사로 인한 추가보강 및 안전사고 위험 상존

- 개착BOX 3,4span일부 수평연결재와 벽체 간섭부 처리방안 검토

평면도	개착BOX구조물
단면도	중간파일 간섭부

○ 현장여건을 감안하여 도로점용기간이 단축되고 시공성이 양호하여 안전사고가 예방되는 매몰처리방안으로 검토

단면도	평면도

○ 주요 공사물량 증․감내역

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감(△)	비고
중간파일 매몰처리	H-300×300	개소	-	70	70
수평연결재 매몰처리	H-250×250	개소	-	16	16
강재사용료(1개년이상)	H-300x300x10x15	ton	8.549	0.603	△7.946
강재사용료(매몰)	H-300x300x10x15	ton	-	8.549	8.549
강재사용료(1개년이상)	H-250x250x9x14	ton	0.895	-	△0.895
강재사용료(매몰)	H-250x250x9x14	ton	-	0.895	0.895
보조Pile 설치 및 철거		개소	108	5	△103
Jack 설치 및 철거	100ton(자재)	개소	-	10	10
피스브라켓제작설치철거	H-300x305x400	개소	-	20	20
스티프너설치철거	H-300	개소	-	20	20

- 개략공사비 : 34백만원(증)

건설사업관리단 의견

○ 시점부 개착BOX 가시설 중 상부 Slab와 중간파일 간섭부 처리비용이 설계에 미반영되어 있어 매몰처리하고, 자립식 수평연결재와 벽체 간섭부 또한 현장여건상 매몰처리하는 것이 타당하며, 중간파일 및 수평연결재 매몰처리 공종의 수량 및 공사비 산정은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 공기에 변동이 없으므로 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.