문서번호	기전과-2841
결재일자	2019.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
노민영		서수일	03/21 이학구
협 조
	주무관			정영술

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

시행계획 보고(경희궁자이)

2019.  3.

서부도로사업소

(기 전 과)

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

시행계획 보고(경희궁자이)

종로구 통일로 경희궁자이 2,4단지 앞 중앙버스전용차로의 버스정류장의 교통안전시설을 개선하여 교통의 흐름을 원활히 하고 시민들의 편의를 증대하고자 함.

□ 관련 근거

○ ’19년 중앙버스전용차로 흐름개선사업 시행계획 알림

- 교통운영과-1108(2019.1.18.)

○ ’19년 중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 재배정

- 교통운영과-2166(2019.2.11.)

- 예산 재배정액: 40,330,000원(신호등설비 공사)

□ 사업 개요

○ 사 업 명: 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(경희궁자이)

○ 사업위치: 종로구 통일로 경희궁자이 2,4단지 앞

○ 사업내용

- 기전과: 교통신호기(차/보) 신설, 교통안전표지 개선

- 도로보수과: 차로재구획, 노면표시 개선

○ 소요예산: 40,330천원

○ 예산과목: 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 버스서비스 이용재고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

□ 공사 내용

○ 제어기 이설 1대

○ 차량신호등 신설 1조, 보행신호등 신설 2조

○ 디자인지주 신설 3본

※ 토목공사는 종로구청에서 시행하고, 노면표시 및 재포장은 우리사업소 도로보수과에서 시행 예정

□ 공사 시행 계획

○ 계약방법: 전자공개 수의계약

○ 입찰방법: 제한입찰(지역제한)

- 제한근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등)

○ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업등록을 한 업체로서, 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지)주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 공사기간: 착공일로부터 30일

□ 향후 추진 계획

○ 2019. 3. : 공사 발주

○ 2019. 4. : 계약 체결 후 착공

○ 2019. 5. : 준공 완료 보고

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.