투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	아이엠유건설(주) 김택성 귀하(서울공예박물관 조성공사)
(경유)
제목	품질시험 처리기간 연장 안내

1. 항상 우리 시정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 감사드립니다.

2. 우리시 품질시험소에 의뢰하신 품질시험이 시험장비 문제로 다소 지연될 것으로 판단되어,「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제6조 2항에 의거 처리기간을 다음과 같이 연장하였음을 알려드리니 이해 있으시기 바랍니다.

다     음   -

○ 품질시험 처리기간 연장 내용

시험접수 번 호	시험품목 (시험항목)	건수	처리 기간	처리 예정일		연장 기간	사 유
				당 초	변 경
2019-83	터파기(평판 재하시험)	1건	4일	2019.3.22. 17:00	2019.3.28. 17:00	4일	시험장비 고장 : 하중 측정 장치의 작동 버튼 불량

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	이용규		토질재료시험과장	03/21 강태근
협조자
시행	토질재료시험과-152	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4644	/전송	02-513-4651	/		/	대시민공개