문서번호	계약심사과-5476
결재일자	2019.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사2팀장	계약심사과장
박홍		노형근	03/21 김수정
협 조

국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2019. 3.

계약심사과

국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 기본 및 실시설계

설계경제성(VE) 심사 실행계획

도시기반시설본부(방재시설부)에서 시행하고 있는「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 기본 및 실시설계」에 대해 VE전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’19년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-4339, ’19.3.7.)

2		심사개요

□ 추진부서 : 도시기반시설본부(방재시설부)

□ 용  역  명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 기본 및 실시설계

□ 위    치 : 경인2지하차도 종점 ~ 영등포구 국회의사당 교차로

□ 사업내용 : 지하차도구간 2.9km, 도로다이어트구간 3.6km, 공원분야(A=112,500㎡)

- 도로다이어트구간, 공원화구간은 푸른도시국과 협의중으로 추후 시행예정

□ 공 사 비 : 302,270백만원

□ 사업기간 : ’19.9. ~ ’23.12.

□ 설계공정률 : 85%

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행 방법 : VE전담팀을 구성하여 심사

○ VE전담팀, 발주부서, 설계사 등 18명 내외

구성원	구성내용	역할
VE리더	▸ 최영민 위원 자람기술(주)	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	▸ 황현철 요원 자람기술(주)
VE업무총괄	▸ 박홍 주무관 계약심사과	․ 설계VE 계획, 회의지원 등
외부 검토위원 (7개 분야)	▸ (도로) 구자관 위원 ㈜목양종합건축사사무소 ▸ (토목구조) 엄종욱 위원 케이에스엠기술(주) ▸ (토목시공) 강동규 위원 ㈜다원이지엔 ▸ (토질) 선희현 위원 ㈜태신엔지니어링 ▸ (전기) 조성돈 위원 상진엔지니어링 ▸ (정보통신) 김익순 위원 ㈜동도이엔씨 ▸ (기계) 김대환 위원 환경시설관리주식회사	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 ․ 아이디어 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	▸ 김소연 주무관 도시기반시설본부(방재시설부)	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자(7명)	▸ 정진황 이사 수성엔지니어링 ▸ 분야별 설계자	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE․계약심사 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’19.3.29(금) 10:00~17:00	- 사업설명 및 분임토의, 현장답사 ‣ 장소 : 합동사무실 內 회의실 및 현장
’19.4. 2(화) 10:00~17:00	- 1차 검토회의 : 가치평가기준(성능) 작성, 기능분석 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19.4. 5(금) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안 창출 및 평가선정 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19.4.12(금) 10:00~17:00	- 최종검토회의 : 구체화 발표, 제안 채택회의 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’19.4.15(월)	- VE제안채택회의 결과 통보 (계약심사과 ⇒ 도시기반시설본부)

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’19.3.19		설계경제성 심사 신청 (발주기관)		▸ 심사 신청서 접수
		’19.3.21		설계경제성 심사 계획수립 (계약심사과)		▸ 추진일정, 시행방법 등 ▸ 설계VE팀 구성
설계경제성심사운영		’19.3.29. ~ ’19.4.12. (15일차)		설계경제성 검토회의 (VE 전담팀)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의 ▸ 최종 검토회의 : 의사결정
		’19.4.15.		제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸채택 검토회의 결과서 통보
		’19.4.15 ~ ’19.4.19 (22일차)		심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’19.4.22 (25일차)		심사결과 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 15,863천원

○ 외부위원 수당 : 15,363천원

- VE리더(기술사+보고서작성)  : 3,265천원(3,265천원 × 1명)

- 검토위원(기술사)           : 10,955천원(1,565천원 × 7명)

- 진행보조요원(중급기술자)    : 1,143천원(1,143천원 ×1명)

※「설계VE 위원 수당 지급기준 개선 계획」(계약심사과-15310, ’18.9.20)에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 지급부서

○ 신청부서(도시기반시설본부 방재시설부)에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - - - - - -  ’19.4.22.

붙   임 : 1. 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2. 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.