투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기(총차 및 3차2회) 계약 의뢰(남부순환로<개봉1동사거리 주변> 평탄화공사)

1. 토목부-4710호(2019.3.21.)와 관련입니다.

2. “남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사” 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기(총차  및 3차2회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사(총차  및 3차 2회)

나. 규    모

- 교량부(오류IC교) : 폭 32m → 38m (차로수 : 5차로→8차로), 연장 38m

- 토공부 : 폭 30m → 46m (차로수 : 6차로→9차로), 연장 1,069m

다. 도 급 자 : ㈜삼일기업공사외 1사

라. 준공기한 연기 사유

- 총  차 : 개봉푸르지오아파트 및 지역주민 집단 민원구간 공사재개를 위한 보완설계 사항 추진 및 본 사업 목적물 완성을 위한 절대공기 부족으로 준공기한 연기

- 3차2회 : 3차 공사 물량중 민원 등으로 공사를 하지 못한 구간 목적물 완성을 위한 절대공기 부족으로 준공기한 연기

마. 준공기한 연기

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
총차	공사기간	2016.03.25 ~ 2019.03.24	2016.03.25 ~ 2020.12.31	증)648일
	도 급 비	21,056,569,000	21,056,569,000	변경없음
3차 2회	공사기간	2018.03.13 ~ 2019.03.24	2018.03.13 ~ 2019.06.30	증) 98일
	도 급 비	1,970,980,000	1,970,980,000	변경없음

붙임 : 1) 설계변경 방침서 1부.

2) 감리 검토의견서 1부.

3) 합의각서 각 1부. 끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	박일연		토목부장	03/21 김영수
협조자
시행	토목부-4761	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/	lhg2023@seoul.go.kr	/	대시민공개