문서번호	방재시설부-4065
결재일자	2019.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		조성만	03/25 이임섭
협 조

『반포천 유역 분리터널 건설공사(2차)』

발주계획  검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『반포천 유역 분리터널 건설공사(2차)』

발주계획  검토 보고

『반포천 유역 분리터널 건설공사』와 관련 ‘19년 예산 배정에 따른 2차 발주계획에 대해 검토 보고 드림.

※ 감리단 공문 : 반포사관 제2019-124호(2019.03.22.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사

○ 공사위치 : 서초구 법원로10 ~ 서초구 사평대로 240 일원

○ 공사규모 : 유역 분리터널(▣4.5m×4.5m ~ D6.5m, 연장1,162m)

○ 도 급 비 : 총차 33,701백만원(1차 : 2,082백만원)

○ 공사기간 : 총차 → ‘18.02.01 ~  ’21.01.30

1차  → ‘18.02.01 ~  ’19.03.31

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

2		발주계획(2차)

○ 공사기간 : 착공일로부터~’20.03.31

○ 발주금액 : 금15,444,000천원

구 분	전 체	기발주(준공)	2차(금회발주)	장 래	비 고
계약금액 (금액비율)	33,700,650 (100.0%)	2,082,000 (6.2%)	15,444,000 (45.8%)	16,174,650 (48%)
공사기간	2018.02.01~ 2021.01.30	2018.02.01~ 2019.03.31	착수일부터~ 2020.03.31

(단위 : 천원)

○ 공종별 공사비 발주 현황

(단위:백만원)

구 분		전 체	기발주(1차)	금회(2차)	장 래	비 고
토목공사	유입부구조개선	272			272
	유입BOX	1,889	704	817	368
	터널부	15,586	617	6,759	8,210
	개착BOX	1,641		171	1,470
	비개착공사	3,160		2,748	412
	계측분석비	866	34	362	470
	품질시험비	191	67	64	60
	계	23,605	1,422	10,921	11,262
조경공사		137	6	106	25
직접공사비 계		23,742	1,428	11,027	11,287
간접공사비		9,959	654	4,417	4,888
도급금액		33,701	2,082	15,444	16,175

○ 분야별 공종 및 물량

(단위:백만원)

구 분	공종 및 수량	금 액	비 고
도급금액		15,444
토목공사	- 유입BOX : L=50m - 터널부 : TBM굴진 L=177m NATM터널 L=60m - 개착BOX : 가시설공사 1식 - 비개착BOX : L=48m	10,921
조경공사	- 수목이식공사 1식	106
직접공사비 계		11,027
간접공사비		4,417

3		책임기술자 검토의견

○ 반포천 유역 분리터널 건설공사의 2차공사 발주계획 내용을

검토한 결과 2019년 예산배정에 따라 발주계획을 검토하였으며

○ 시공사에서 제출한 2차공사 발주설계서,수량산출서,공정계획이

적정하게 작성된 것으로 판단됨.

4		조치계획

○ 책임건설사업관리용역사인 ㈜도화엔지니어링에서 요청한 바와 같이

2차분 공사를 발주(계약의뢰)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 2차공사 발주요청 공문 1부.

2. 내역서(총차, 2차) 각 1부. 끝.