문서번호	정수시설과-929
결재일자	2019.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
남상욱		백상희	03/25 서대훈
협조	행정관리과장		홍동섭
	정수과장		김형섭

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고마시는 아리수’

청사 본관 시설개선 및

사무실 재배치 공사 발주 계획

2019. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

청사 본관 시설개선 및

사무실 재배치 공사 발주 계획

우리 센터 본관 청사 시설개선 및 노후시설 정비를 위한 재배치를 통해 업무효율성과 편의성을 제고하고 사무공간을 확보하고자 함

Ⅰ		추진 배경

미관저해 시설 개선 및 노후시설 정비로 사무공간 확보

본관 1층 입구에 휴게실 및 샤워실이 배치되어 미관 저해

문서자료, 도면, 사진, 각종 백서 및 보고 자료 보관실 부재

각 과별 회의 및 소통 공간 부족 등

청사 재배치를 통한 업무효율성 및 편의성 제고

사무환경 개선으로 업무효율성 및 편의성 증대 필요성 제기

청사 재배치로 각 과별(분야별) 요구(필요)사항 수렴

업무 연관성을 고려하여 소통하는 종합적인 계획 검토 등

※ 청사 현황

‣구  조 : 지하 1층 ~ 지상 2층

‣연면적 : 3,470㎡

‣층별 배치내역

구 분	층 별	층별 내역
지 상	2층	소장실, 중앙제어실, 실험실, 탁구장, 화장실, 샤워실
	1층	사무실, 방호실, 홍보관, 소회의실, 남·여휴게실, 화장실, 샤워실
지 하	1층	구내식당, 노조사무실, 휴게실, 물품창고, 문서고, 수배전반실

Ⅱ		발주 계획

사업개요

사 업 명 : 청사 본관 시설개선 및 사무실 재배치 공사

소요예산 : 금210,000,000원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,

수선유지비(기본경비)

계약방법 및 입찰참가자격

계약방법 : 공개경쟁입찰(지역제한)

입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 “시설물유지관리업” 면허 등록을 필한 자로 주된 영업소의 소재지가 서울시,경기도에 소재한 업체

공사공사 세부 내역 (붙임 청사 평면도 참조)

연번	대상	현 위치	변경 위치	비고
1	물품창고	지하1층	아리수동	이동
2	남자 샤워실	1층	지하 1층(물품창고)	이동
3	남자 휴게실	1층	지하 1층(노조사무실)	이동
4	탁구장	2층	아리수동	시설물연간단가
5	자료실	-	2층 탁구장	신규 설치
6	방호실	1층	1층(샤워실 입구 확장)	확장
7	노조사무실 및 소회의실	-	1층(휴게실, 샤워실)	이동 및 신규
8	탕비실, 휴게공간	-	1층(사무실)	신규 설치

※ 샤워실 배수배관 연결 작업 및 탁구장 이전은 토목건축 시설물 연간단가 업체 작업지시

※ 아리수동 물품창고, 탁구장 설치건 등 전기 조명설치는 전기 연간단가 업체 작업지시

※ 탕비실(사무실)은 수전문제 검토, 회의 및 휴게공간이 마련될 수 있도록 캐비닛 재배치

추진일정

2019. 3 : 설계심사요청(본부 안전총괄과) 및 발주

2019. 4 : 계약 및 착공

2019. 10 : 설계변경 및 준공시행

붙임 : 1. 설계서 1부.

2. 청사 본관 평면도 1부.  끝.