투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	렛서팬더 방사장 조성공사 및 서울대공원야구장 잔여부지 정비공사 준공기한 연기의뢰

1. 서울대공원 중점사업으로 추진중인 「렛서팬더 방사장 조성공사」 및 「서울대공원 야구장 잔여부지 정비공사」에 대하여 아래와 같이 각각 준공기한 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업내역

공 사 명	공사기간	계약금액(원)	계약자	비고
① 렛서팬더 방사장 조성공사	‘18.07.17. ∼ ’19.3.31.	************** ************** **************	************** ************* ************ *************
② 서울대공원 야구장 잔여부지 정비공사	‘18.12.28. ∼ ’19.3.30.	***********	********** ******

나. 준공기한 연기 내용

공 사 명	변 경 사 항		비고
	당 초	변 경 후
① 렛서팬더 방사장 조성공사	‘18. 7.17. ∼‘19. 3.31	‘18. 7.17. ∼ ‘19. 4.15.
② 서울대공원 야구장 잔여부지 정비공사	‘18.12.28. ∼‘19. 3.30	‘18.12.28. ∼ ‘19. 4.31.

· 귀책소재 : 서울대공원

· 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 준공기한 연기 사유

【 렛서팬더 방사장 조성공사 】

- 렛서팬더 시험방사를 ‘19. 4. 2 ~ 4. 15.(15일간) 실시함에 있어 방사 후 새로 조성한 시설물과의 예견치 못한 문제점(탈출 등) 유·무에 대한 검토 기간 필요.

【 서울대공원 야구장 잔여부지 정비공사 】

- 기 조성된 성인야구장 홈플레이트 후면 토사 적치로 인하여 망실된 인조잔디 추가 정비 (대공원장 지시사항)와 관련 절대공기 부족.

붙임 :  1. 준공기한 연기 의뢰서 각1부.

2. 준공기한 연기검토 보고서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	한상길		시설과장	03/26 오임석
협조자
시행	시설과-2050	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7440	/전송	02)507-7230	/		/	부분공개(7)