문서번호	시설보수과-2477
결재일자	2019.3.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	03/26 이학구
협조
	주무관		최지락

욱천고가차도 보수공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3

서부도로사업소

시설보수과

욱천고가차도 보수공사 시행계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 욱천고가차도에 대하여 ‘18년 정밀점검결과에 따른 보수공사를 시행하여 시설물의 내구성능 회복 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

○ ‘18년 정밀점검 용역 (2018. 12. )

○ ‘19년 사업추진계획 보고 시설보수과-832(2019.01.29.)

○ ‘19년 특정제품(공법) 심의결과보고 시설보수과-1934(2019.03.11.)

Ⅱ		시설물 현황

시설물명	위 치	규 모		구조형식	준공 년도
		폭(m)	연장(m)
욱천 고가차도	용산구 원효로2가 15-6	11.4	459	PSC, STB, RC	1979년

Ⅲ		공 사 발 주 계 획

○ 공 사 명: 욱천고가차도 보수공사

○ 위    치: 용산구 원효로2가 15-6

○ 공사개요: 단면복구(t=30mm) A=454㎡, 표면보수 A=2,615㎡

균열보수 L=66m, 보강판 보수 63개소, 기타 1식

○ 공사기간: 착공일로부터 180일

○ 공 사 비: 500,000천원(도급비 499,000,  이전비 1,000)

○ 예산과목: 교량안전과, 고가차도 및 입체교차로 관리, 욱천고가차도,  시설비

Ⅳ		시 행 방 안

○ 계약방법(긴급)

- 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

- 긴급공고사유 : 서울시민이 많이 이용하는 주요시설물로서 손상된 시설에 대하여 조속히 보수를 시행하므로서 시설물의 안전 및 유지관리에 철저를 기하고자 하며, 지방계약법 시행령 제35조 제4항 제2호에 의거 지방재정 조기집행을 위하여 긴급공고

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 제9조에의한 시설물유지관리업 등록업체로서 입찰일까지 당해 자격을 유지한 업체로, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 본 공사는 신기술(특허)공법 적용공사로 낙찰자는 계약체결전 특허권자와 체결한 기술사용 협약서를 제출하여야 한다.

특허번호	내용	특허(신기술)권자	주소
제10********호	콘크리트 구조물의 보수공법	리플래시기술㈜외 2	강동구 성내로 52 (성내동, 성원빌딩)

Ⅴ		향 후 계 획

○ 2019.   3 : 공사발주

○ 2019.   4. : 계약 및 착공

○ 2019.  10. : 공사준공

따로붙임  공사발주자료 각 1부.    끝.