“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(서울 국제교류복합지구 조감도 및 투시도 제작 용역)

1. 동남권사업과-2941(2019.3.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 과에서 추진하는 ‘서울 국제교류복합지구 조감도 및 투시도 제작’ 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 사업명: 서울 국제교류복합지구 조감도 및 투시도 제작 용역

나. 계약기간: 2019.3.12.~ 2019.3.29.

다. 계약업체: 주식회사 렉스스페이스

라. 변경내역

구분	당초	변경	증감내역
계약금액	15,290,000원	28,600,000원	13,310,000원
계약기간	2019.3.12.~ 2019.3.29.	2019.3.12.~ 2019.5.10.	-

마. 변경사유 : 당초 계약물량 대비 추가물량 발생으로 계약금액 및 기간변경

바. 예산과목 : 동남권사업과, 국제교류복합지구 조성, 국제교류복합지구 공간계획, 국제교류복합지구 조성사업 추진, 사무관리비

붙임 1. 변경계획 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 과업지서시 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	동남권사업과장
주무관	이경남		지역발전팀장	조경익		동남권사업과장	03/26 김창환
협조자
시행	동남권사업과-2966	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 5층 203	/
전화	2133-8230	/전송	2133-0741	/	namilee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)