투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(1차2회) 계약 의뢰(탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역)

우리 본부에서 시행중인 「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차2회,정산) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설폐기물처리용역

나. 계약금액 및 용역기간

구 분	총 차 분(원)	1차분(원)	비 고
도 급 비	139,640,000	105,955,000
용역기간	`17.09.01.~`19.12.20.	`17.09.01.~`19.04.01.

다. 계 약 자 : ㈜우성산업개발

라. 설계변경 내역(용역기간 변경없음)

구 분	당 초 금 액(원)	변 경 금 액(원)	증 ․ 감(원)	비 고
총차분	139,640,000	139,640,000	0	변경없음
1차분	105,955,000	89,138,000	△16,817,000

○ 변경사유 : 1차 폐기물 실반출 물량 정산

마. 예산과목 : 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산,

시설비및부대비, 시설비.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계도서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송영배		치수시설과장	조성만		방재시설부장	03/26 이임섭
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	방재시설부-4177	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개