문서번호	도로보수과-2775
결재일자	2019.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		유태용	03/26 김용제
협조

2019년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제1차 작업계획 보고

2019. 03.

강서도로사업소

[도로보수과]

제 1차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 03. 12. ~ 2019. 12. 13.

○ 시 공 사 : ㈜도수건설 대표 박미경

○ 도 급 비 : 금251,558,600원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	공원로 미래초교앞 교차로	시선유도봉설치	20개	√		민원
2	시흥IC	시선유도봉설치	30개	√		민원
3	시흥IC	시선유도봉철거	3개	√		민원
4	가마산로97 구로현대아파트 앞 중앙선	시선유도봉설치	5개	√		민원
5	경인로 라온펠리스 앞 중앙분리대	시선유도봉설치	8개	√		민원
6	오목로77	시선유도봉설치	60개	√		민원(경찰)
7	국회대로 국회경비대 앞	시선유도봉설치	100개	√		민원
8	노들로 여의2교 진입램프 안전지대 내	시선유도봉설치	45개	√		민원
9	공항대로 615 강서평생학습관 앞	장애물표지판	1개	√		순찰적출
10	강서구 화곡1동 1089-5	무단횡단금지시설 보수	3경간	√		민원
11	양천로 개화초등학교 앞	무단횡단금지시설 보수	7경간	√		순찰적출
12	목동중앙서로7가길 39	무단횡단금지시설 보수	3경간 가로봉10개	√		민원
13	남부순환로511 자전거도로	자전거도로 휀스 보수	5경간	√		민원
14	관내 시설물 세척	방호울타리, 충격흡수시설	7,776㎡	√		봄맞이 환경정비

※추후 현장여건에 따라 지시물량의 경미한 변경 가능(시설물 세척 물량 등)

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에

작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제1차 작업지시

- 작업위치 :공원로(미래초등학교 앞) 등

- 작업기간 : 2019. 03. 25. ~ 2019. 04. 30.

- 공종 및 물량 :“별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 96,987천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

공 사 명	도 급 비 (A)	기 집행 공사비 (B)	금회사용(1차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
2019년 도로 및 교통안전 부속물시설물 유지보수공사	251,558,600	-	96,987,000	154,571,600

붙임 1. 작업지시서 및 위치도 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.

3. 시설물 세척 수량산출서 1부.  끝.