＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차-최종) 시행[2018년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물 정비공사]

1. 우리센터에서 시행중인 『2018년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물정비공사(장기계속단가계약)』건에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차-최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물정비공사(장기계속단가계약)

나. 계약업체 : (주)이젠리버텍 대표 조보연

다. 공사기간 : 2019.1.1 ~ 2019.5.30.(총부기기한 2018.6.1 ~ 2019.5.30)

라. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	감액(원)	비고
총부기금액	170,353,000	170,352,000	1,000
금회(2차수)계약금액	21,494,000	21,493,000	1,000

마. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증․감사항 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부

2. 설계변경 내역서 및 관련서류 각 1부.  끝.

★주무관	장현순		정수시설과장	김석정		뚝도아리수정수센터소장	03/27 김중영
협조자	주무관	김영후		주무관	양은영		주무관	석은숙
시행	정수시설과-1566	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 왕십리로27	/
전화	02-3146-5579	/전송	02-3146-5508	/	buddhist93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)