문서번호	주거환경개선과-3839
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경계획팀장	주거환경개선과장
김남경	박세진	03/27 남정현

이화충신권 성곽마을 낙산성곽길 정비공사 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03.

도시재생실

(주거환경개선과)

이화충신권 성곽마을 낙산성곽길 정비공사 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

「이화충신권 성곽마을 낙산성곽길 정비공사 실시설계 용역」을 수행하는 과정에서 관계기관 및 부서와의 추가 협의 및 도시공원위원회 심의 절차 이행을 위해 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 이화충신권 성곽마을 낙산성곽길 정비공사 실시설계용역

□ 용역기간 : 2018.05.30. ~ 2019.03.29.

******************************************

*********************************

□ 추진경과

□ ‘17.12.11. 한양도성 순성길 주변 정비사업 실행계획

□ ‘18. 2.23. 문화재 현상변경 허가

□ ‘18. 4.29. 용역 계약

□ ‘18. 8.29. 착수보고

□ ‘18.10.24. 한양도성 자문위원회 자문

□ ‘18.11.05. 문화재 현상변경 허가사항 변경허가 의뢰

□ ‘18.11.29. 설계변경 시행

□ 계약변경사항

□ 계약변경 내용

구분	****	****	**
용역기간	*******************	*******************	*****
용 역 비	*********
용역업체	*******

********************

***********************************************************************************************.

□ 향후 계획

□ ’19.03. : 재무과에 용역계약 변경(연장)의뢰

□ ’19.04. : 용역 준공

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 예정공정표(변경)1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.