문서번호	도로계획과-4374
결재일자	2019.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민자사업팀장	도로계획과장
김정식		조용상	03/27 안대희
협조

「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 기본설계」

설계변경(정산) 검토보고

2019. 3.

안전총괄실
(도로계획과)

설계변경(정산) 검토 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 기본설계

○ 계약업체 : ㈜유신, ㈜진우엔지니어링코리아

○ 용역기간 : ’16.5.19~’19.3.31

○ 계약금액 : 금880,217,000원(2차 : 금380,217,000원)

□ 보고내용

○ 계약변경(정산)

- 전    체 : (당초) 880,217,000원 → (변경) 878,717,000원(감 1,500,000원)

- 2차계약 : (당초) 380,217,000원 → (변경) 378,717,000원(감 1,500,000원)

구 분		전체	2차계약	증 감
총용역비	당초	880,217,000원	380,217,000원	-
	변경	878,717,000원	378,717,000원
공급가액	당초	791,796,370원	343,616,460원	-
	변경	791,796,370원	343,616,460원
손해배상공제료	당초	2,310,000원	1,399,000원	-
	변경	2,310,000원	1,399,000원
부가가치세	당초	79,410,630원	34,501,540원	-
	변경	79,410,630원	34,501,540원
관리청복구비	당초	4,600,000원	-	-
	변경	4,600,000원	-
자문비	당초	2,100,000원	700,000원	감1,500,000원
	변경	600,000원	-800,000원

- 사 유 : 자문비 정산에 따른 감액 조치

□ 향후계획

○ ’19.03. : 변경 계약 및 용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 요청공문 1부.
2. 설계변경(정산) 내역서 1부. 끝.