문서번호	정수시설과-2925
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		남효돈	03/28 박동규
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

2018년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(연간단가_2차) 설계변경 보고

2019. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(연간단가_2차) 설계변경 보고

우리 정수센터에서 시행중인『2018년 전기설비 유지보수 공사』의 물량 증․감 및 신규공종이 발생하여 아래와 같이 설계 변경을 시행하고자 보고 드림

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 전기설비 유지보수 공사(장기계속)

○ **********************************

- **************************************

- **************************************

○ ********************

- *******************************

- ********************************

○ 계약업체 :***********

○ 공사내용 : 정수센터 전기설비 예방정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 물량 증․감 및 신규공종 발생 및 제경비(보험료) 정산

○ 계약기간 : 변경 없음

○ 계약금액

구 분	당초 금액		변경 금액		증감금액	비고
총공사비	***********		***********		**********
	*********	*********	*********	*********
도급비	***********	***********	***********	**********	**********

○ 신규공종 주요내용

- 송수배관 중간밸브실 배수펌프 제어반 신설

- 여과지동 공동구 배수펌프 제어반 철거 및 신설

- 중앙제어실 조명등 교체

- 관리본관 비상전화 통신케이블 포설

※ 세부사항 설계변경내역서 붙임 참조

□ 조치의견

○ 완료 작업 건에 대한 설계 변경 시, 실제시공 증․감 물량정산 및 신규 발생공종들을 반영하고자 하며,

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최 후 심의 결과를 반영하여 설계변경하고자 함

□ 행정사항

○ 설계변경 심의위원회 개최

○ 설계변경 및 변경계약

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.