문서번호	급수운영과-5115
결재일자	2019.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
양봉우	김태형	03/28 윤순용
협 조
	주무관		임인택

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2019년 포장도로 굴착복구공사 발주 계획

2019. 3.

강동수도사업소

2019년 포장도로 굴착복구공사 발주 계획

2019년 우리 사업소에서 시행하는 각종 상수도공사로 인하여  굴착하는 도로에 대한 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)를 발주하여 포장복구에 만전을 기하고 시민불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명: 2019년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

❍ 공사위치: 강동수도사업소 관내

❍ 공사개요: 아스팔트포장 176a, 콘크리트포장 6a, 보도블록포장 6a

❍ 공사기간: 착공일~2020. 4. 30.

❍ 발주금액(심사요청액): 금2,352,000,000원(도급비)

※ 본청 계약심사 결과에 따라 발주금액 조정

Ⅱ		보 고 내 용

❍ 『2018년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』의 계약기한이 2019년 4월 30일로 예정됨에 따라 향후 지속적인 포장복구를 위하여 발주가 필요한 실정임.

❍ 예산집행 현황

(단위: 원)

구 분	계약금액	기 집행액	잔 액	비 고
2018년 포장공사	2,140,008,000	1,676,829,000	463,179,000	4월말 이전 집행예정

Ⅲ		보 고 의 견

❍ 현재 진행 중인『2018년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』를 준공기한(2019. 4. 30.)에 공사 준공 처리하고,

❍ 2019년 5월 1일 이후 도로굴착으로 인한 시민불편을 최소하고 지속적인 포장복구를 위하여 2019년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)를 발주하여 각종 상수도 공사시행에 지장이 없도록 하고자 함.

Ⅳ		계 약 방 법

❍ 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률」제24조(장기계속계약)

❍ 입찰방법: 공개경쟁입찰

❍ 예정물량: 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2016~2018년까지 3개년 평균치를 산출하여 전체 설계물량으로 예상하여 산출

Ⅴ		세부 추진계획

❍ 세부 추진일정

- 본청 설계심사의뢰: 2019. 3. 25.

- 계약의뢰: 2019. 4. 1.

- 공사계약 및 착공: 2019. 4월말

❍ 향후 추진계획

- 본청 계약심사과에 계약심사 의뢰하여 심사결과에 의거 발주시행

붙임  설계내역서 1부.  끝.