문서번호	건축부-4975
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정인호		유현수	03/28 임인구
협 조
	실무사무관			임형준
	주무관			代김준회

『서울애니메이션센터 철거공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

『서울애니메이션센터 철거공사』

실정보고에 대한 검토보고

『서울애니메이션센터 철거공사』관련, 건물철거 추가수량 및 현장주변 건물 청소용역에 대한 실정보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토 보고 드림

1		공사개요

○ 위    치 : 중구 소파로 130,126(예장동 8-20외 3필지)

○ 철거규모 : *****************************

○ 공사기간 : **********************

○ 공 사 비 : *********

○ 건설사업관리용역사 : ㈜혜원까치종합 건축사사무소

○ 시 공 자 : 마도건설환경(주)외 1

2		추 진 경 위

‘18. 10. 01.  : 건설사업관리용역 계약 체결

‘18. 12. 07.  : 철거공사 착수

‘19.   2. 26.  : 거점성장추진단 청소관련 업무협조 요청(거점성장추진단  →  건축부)

‘19.   2. 28.  : 주변건물청소 관련 업무지시(건축부  →  건설사업관리단)

‘19.   3. 18.  : 주변건물청소 실정보고(건설사업관리단 → 건축부 )

‘19.   3. 25.  : 건물철거 추가수량 실정보고(건설사업관리단 → 건축부 )

3		실정보고 내용

관련문서 : *****************************************************************************************

실정보고 사유

*****************************************************************

***********************************************************

관련규정 : 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

- 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

- 제19조의5(발주기관의 필요의 의한 설계변경)

실정보고 내용 : *****************(부가세 포함)

(단위: 원)

실정 보고	변 경 전	변 경 후	공사비 증·감	비고
***************	*	**********************************	************	***********
******************* ********	*	***************** *************** *********** ************** ************	************	**** ******
		****************** ***************** *****************	*************
****			*************

4		건설사업관리단 검토의견

***********************************************************************************************************************************

*******************************************

5		처리의견

****************************************************************

****************************************************************

*******************************************************************************************

붙임 : 1. 거점성장추진단 업무협조 요청 공문 1부.

2. 실정보고 검토 보고 각 1부.(건설사업관리단).  끝.