문서번호	보행정책과-430
결재일자	2019.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로공간재편팀장	보행정책과장
이종석	박창수	01/10 박태주

’19년 (역세권)보행환경개선 사업 설계비 배정 계획

2019.  1.

’19년 (역세권)보행환경개선사업 설계비 배정 계획

’19년 역세권 보행환경개선 사업대상지로 선정된 해당 자치구에 설계비를 배정하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 사업대상 : 16개소

- 1년 사업 11개소, 2년 사업 5개소

○ 사업기간 : ’19. 1. ~ 12.

○ 사 업 비 : 4,598백만원(시비)

- 설계비 배정액 : 502백만원

(단위: 백만원)

개 소			사 업 비(시비)
계	1년	2년	계	’19년		’20년
	사업	사업		설계비	공사비(추정)	설계비
16	11	5	4,598	255	4,096	247

○ 예산과목 : 교통사업특별회계/ 도시교통실 보행정책과/ 보행권향상 및 교통약자 안전관리/ 보행환경 개선/ 보행화경개선지구 조성/ 시설비(202-401-01)

□ 사업일정

○ ’19.   1.     : 설계비 지원

○ ’19.   1.     : 1차 설계자문(각 사업대상지 설계방향 제시)

○ ’19.   2.     : 보행환경개선지구 고시

○ ’19.   3.     : 2차 설계자문(16개소 설계중간 검토)

○ ’19.   5.     : 설계심의 및 공사비 지원(1년 사업 11개소)

○ ’19.   6.     : 3차 설계자문(2년 사업 5개소)

○ ’19.   8.     : 설계심의(2년 사업 5개소)

○ ’19. 11.     : 1년 사업 11개소 공사 준공

□ 자치구 설계비 요청 금액 현황

○ 설계비 요청에 따른 시비 배정 금액                (단위 : 백만원)

연번	자치구	위 치	설계비 배정액		증·감	비고
			당초	변경
1	중구	· 약수역 ~ 버티고개역	100	100		2년 사업
2	성동구	· 왕십리광장로 등	24	60	증)36
3	동대문구	· 신설동 109-4 일대	15	15
4	중랑구	· 사가정로51길 및 면목로 등	37	37		2년 사업
5	성북구	· 화랑로(월곡역 ~ 상월곡역)	50	50		2년 사업
6	노원구	· 월계동 47-25 일대	50	50		2년 사업
7	은평구	· 통일로83길 등	16	16
8	서대문구	· 창천동 52, 57 일대	0	20	증)20
9	마포구	· 디지털미디어시티역 주변	30	30
10	금천구	· 시흥대로50길 등	10	10		2년 사업
11	영등포구	· 문래로 197 일대	-	-
12	관악구	· 신림로65길 일대	80	80
13	서초구	· 영동1교 ~ 바위뫼 공원	0	20	증)20
14	강남구	· 선릉로86길	4	4
15	송파구	· 오금로11길 등	-	-
16	강동구	· 양재대로89길 등	10	10
합 계			426	502	증)76

※ 각 사업대상지 사업비(설계비 + 공사비) 변동 사항 없음

※ 사업비 내 설계비 조정

○ 설계비 조정 사유                                 (단위 : 백만원)

자치구	설계비 배정액 (시비)		조정 사유
	당초	변경
성동구	24	60	- 당초 토목공사에 대한 설계만을 계획 하였으나, 사업대상지는 4개의 지하철 노선 및 마을 버스, 보행향 등의 교통분야 현황조사가 필요하여 증액함
서대문구	0	20	- 당초 자체설계 계획이었으나, 연세로 대중교통지구 운영과 연계하여 교통체계 개선 민원이 증가함에 따라 체계적이고 전문적인 교통분야 등 설계 필요
서초구	0	20	- 당초 구비 30백만으로 설계하고자 하였으나, 구 예산이 삭감 됨에 따라 우선 시비로 설계하고 추후 구 추경 등의 별도 예산을 확보하여 공사비로 활용

끝.