투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 변경 계약의뢰(총차4회, 2차4회)-신마포나들목 신설공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『신마포나들목 신설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차4회, 2차4회)을 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 신마포나들목 신설공사

- 공사기간 : (총차) ‘17.08.30. ~ ’19.11.17.

(2차) ‘18.02.20. ~ ’19.03.31.

- 공 사 비 : (총차) 4,677,000천원

(2차) 2,840,765천원

- 시 공 사/감 리 사 : 우탑건설㈜/㈜삼안 외 2개사

나. 변경사항

(단위:원)

구 분		변경 전	변경 후	비 고
계약금액	총 차	4,677,000,000	4,728,434,000	증) 51,434,000
	2 차	2,840,765,890	2,491,000,000	감) 349,765,890
공사기간	총 차	‘17.08.30.~’19.11.17.	변경없음
	2 차	‘18.02.20.~’19.03.31.	변경없음

다. 변경사유

- 물가변동분 반영 및 공사 물량조정

라. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, (100-401-01)시설비

붙  임 : 1) 설계변경 검토의견서 1부.

2) 총차 변경 내역서 1부.

3) 2차 변경 내역서 1부.

4) 설계변경(총차4회, 2차4회) 보고서 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	정창수		기반시설과장	03/28 라철흠
협조자	주무관	김경화		기획예산과장	문영일
시행	기반시설과-777	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개