“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	삼중환경기술(주)
(경유)	마포자원회수시설 운영소장
제목	2019년 상반기 마포자원회수시설 소정비 계획 승인 알림

1. 삼중환경 18-129(2019.3.28.)호 관련입니다.

2. 마포자원회수시설 2019년 상반기 소정비 계획을 아래와 같이 승인하오니 정비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건      명 :‘19년 상반기 마포자원회수시설 소정비 계획 승인

나. 소정비기간 :‘19.4.19.(금) ~ 5.8.(수)

구 분	일 정	비 고
1호기 정비 2호기 정비 3호기 정비	04.19 ~ 04.29(11일) 04.23 ~ 05.02(10일) 04.26 ~ 05.08(13일)	1,2,3호기 (화격자 보수, 소각로 및 환경설비 세정, 쓰레기크레인 보수, 기타 설비류 등]
폐기물 반입정지	04.18 ~ 05.01(14일)	폐기물 수도권 매립지 처리
폐기물 반입제한	05.02 ~ 05.14(13일)	500톤/일
소각로 가동	04.29 #1-18:00 05.02 #2-18:00 05.08 #3-18:00	승온(보조버너 점화) 〃 〃
폐기물 투입	04.30 #1-18:00 05.03 #2-18:00 05.09 #3-18:00

다. 소요예산 : 506,334천원

라. 정비내역 : 쓰레기크레인 및 재크레인 보수 공사 등

마. 승인조건

- 계약 관련 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」준수하여 추진

- 공사 발주금액(예정가격)은 승인한 금액을 기준으로 하여 최대한 예산을 절감할 수 있도록 추진

- 단가계약 등 (기성) 준공시 시공물량에 따라 정산에 철저를 기할 것

- 시공관리 및 감독에 만전을 기하고 하자이행보증 등 사후관리 철저

- 자체정비 및 외주공사 시 안전을 최우선으로 하여 시행

- 작업 전·후 정리정돈 철저 이행

- 소정비 완료 후 결과보고 할 것

첨부 : 2019년 상반기 마포자원회수시설 소정비 계획 1부.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	장주혁		자원회수시설팀장	유준수		자원순환과장	03/29 최규동
협조자
시행	자원순환과-5637	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3686	/전송	02-2133-1026	/	organicuri@seoul.go.kr	/	대시민공개