문서번호	시설관리과-7481
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
홍민표	김대용	03/29 천성훈

설계변경(3차,최종) 심의위원회 개최 결과 보고

(2018년 망우본동외 8개동 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

동부도로사업소

시설관리과

설계변경(3차,최종) 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인「*******************************」에 대하여 시공물량 증․감등이 발생됨에 따라 설계변경(3차,최종)에 따른 심의위원회를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명: *******************************

❍ 도 급 자: ***********

❍ 공사개요

- 당 초: *******************

- 변 경: **************************

❍ 공사기간: ************************

❍ 공사금액 변경 내역

구 분	금 액(원)		증 감(원)	비 고
	당 초	변 경
총공사비	***********	***********	**********	**************
도 급 비	***********	***********	**********
관급자재비	***********	***********	*

Ⅱ		설계 변경 사유 및 목록

❍ 공사시행에 따른 물량 증감

- 물량증가: A-파쇄물운반(2.5DT 현장→집하장3km)외 97개 공종

- 물량감소: 콘크리트포장깨기(굴삭기0.2㎥,브레이커)외 277개 공종

- 신규공종: 대형계량기 설치공

Ⅲ		심 의 개 최

❍ 심의일시: 2019. 9. 28.(목) 15:00~

❍ 심의장소: 3층 회의실

❍ 심의위원: 위원장: 시설관리과장

위  원: 시설6급 박종일, 이훈재, 유광창, 김대용

Ⅳ		심 의 결 과

❍ 신규공종 산출 적정성 여부: 적정

❍ 물량 변동 및 단가 적용 등의 적정성 여부: 적정

❍ 관련규정 및 적법성 여부: 적정

❍ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부: 적정

Ⅴ		처 리 의 견

❍ 설계변경 심의 결과 신규공종, 물량 변경 및 단가 산정 등이 적정하므로 설계변경 계약 시행코자 합니다.

붙임  1) 설계변경 심의 의견서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 설계변경 사유서 1부.  끝.