문서번호	시설관리과-6156
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이동섭	김남구	이경희		03/29 배현숙
협 조

송배수관 부설공사 발주 계획

(신방화사거리~공항대로 송배수관 부설공사)

2019. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

송배수관 부설공사 발주 계획

(신방화사거리~공항대로 송배수관 부설공사)

누수, 수질사고, 돌발 사고 등 대비 블록시스템 구축과 정수장간 공급체계 구축 및 주요관로 이중화를 통하여 단수없는 안정적인 급수 공급체계 구축을 위한 송배수관 부설공사의 발주계획을 수립 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사명 : 신방화사거리~공항대로 송배수관 부설공사

□ 공사개요

- 배수관 부설 : D=200~600mm, L=1,465m

- 밸 브 설 치 : D=100~600mm, N=21개소

□ 사 업 비 : ***************************

□ 공사위치 : 강서구 방화1동 신방화사거리～공항동 공항대로

□ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비

(증블록별 무단수 급수체계 구축 사업)

Ⅱ		위 치 도

Ⅲ		보고내용

□ 진행사항

- ’18년 무단수 급수체계구축 사업계획 통보 : 2019. 1. 2

- 설계도면 심사 : 2019. 1. 16

- 설계도면 심사 결과 통보(본부 ⇒ 사업소) : 2019. 1. 30

- 교통소통대책 용역 시행 : 2019. 3. 06

- 설계도서 검토 요청(사업소 ⇒ 서울시설공단) : 2019. 3. 21

- 설계 심사 요청(사업소 ⇒ 본청 계약심사과) : 2019. 3. 21

- 설계 심사 결과 통보(본청 계약심사과  ⇒ 사업소) : 2019. 3. 26

Ⅳ		행정사항

□ 본청 일상감사 의뢰

□ 교통소통대책 심의 요청 : 2019. 4.(예정)

□ 공사시행 및 계약의뢰 : 2019. 4.(예정)

□ 공사착공 : 2019. 4. 25 ~ 4. 30(교통소통대책 심의 완료 후)

붙임 : 설계 내역서 1부.  끝.