문서번호	수질과-911
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	수질과장		생산부장		상수도사업본부부본부장
김병기	서한호		유병기		01/29 배광환
협 조
	기획예산과장					박재희

2019년도 염소설비 유지 및 안전관리공사 (단가계약) 발주계획

2019. 1.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 염소설비 유지 및 안전관리공사(단가계약) 발주계획

정수센터에 설치 운영중인 고압가스시설중 유독성 염소설비에 대하여 폭발 및 가스누출 사고 등 재해예방을 위하여 전문업체와 시설유지보수 연간단가 계약을 추진하여 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		근거 및 배경

□ 근 거

○「아리수정수센터 고압가스 위험시설(염소설비)」 안전점검 및 시설유지보수 연간단가계약 추진계획 : 본부장 방침(수질과-6778, 2014. 9.30)

※ 2015년부터 단가계약 시행중

□ 추진 배경

○ 염소 소독공정은 안전한 수돗물 생산을 위한 필수 공정이지만 염소가스 누출 시 인체에 치명적 영향을 주는 유독성 가스임

○ 염소설비 유지보수 전문업체를 통한 사전점검․정비로 재해 및 안전사고를 예방하기 위해 단가계약 시행

Ⅱ		‘18년 계약 및 집행현황

□ 계약 현황

○ 계약업체 : ㈜ 아큐스 (대표 이희헌)

○ 계약기간 : 2018. 3.2 ~ 12. 26

○ 계약금액 : 금565,259천원

□ 준공현황

○ 주요 작업내역

- 염소설비(기화기,투입기,배관 등) 세관

- 급속분사교반기 등 염소설비 분해 안전점검 및 부품교체

○ 예산 집행현황 : 금602,822천원(계약금액 대비 증 37,563천원)

(단위 : 천원)

구 분	합계	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
집행금액	602,822	15,710	115,890	29,600	59,790	184,620	142,410

Ⅲ		2019년 단가계약 추진계획

□ 대    상 : 6개 정수센터 염소설비

□ 계약기간 : 계약일로부터 2019. 12. 16까지

□ 발주금액 : 총 743,996천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 정수시설 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 산출근거 : 염소설비 시공업체 및 판매업체 견적등에 의한 산출

※ 센터별 편성예산                                  (단위 : 천원)

합계	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
942,963	35,000	210,000	100,000	112,900	295,063	190,000

- 발주금액 및 예산 편차 사유 : 단가계약 발주전 설비 소수선 등 예산사용

□ 염소설비 현황

센터별	기화기	투입기	진 공 조절기	인젝터	가스 필터	급속분사 교 반 기
소 계	30	80	33	49	29	56
광암	2	6	3	4	2	3
암사	8	16	8	10	8	22
구의	2	15	2	6	2	10
뚝도	5	16	5	10	5	6
영등포	4	12	6	6	4	7
강북	9	15	9	13	8	8

□ 주요 작업내역

○ 염소설비(기화기,투입기,진공조절기,필터) 세관 및 소모품 교체

○ 염소설비 및 급속분사교반기 정기적 분해 안전점검 실시

○ 야간‧공휴일 등 취약시간대 긴급복구

○ 고장 기계 수리 및 부품교체 등

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰참가자격 제한

① 건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종) 면허를 보유한 업체

② 법인등기부상 본점소재지가 수도권에 소재한 업체

(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)

③ 최근 10년내 정수장에서 염소투입설비 세관 실적을 보유한 업체

※ 사유 : 유독사스 안전사고 예방 및 염소설비 사고발생 시 신속한 대응 능력을 확보하기 위하여 실적 및 지역제한

○ 하자기간 : 준공검사일부터 2년

□ 작업지시 및 정산

○ 정수센터별 안전관리자의 감독하에 필요한 작업지시

○ 안전관리자의 검수 및 시운전 완료 후 대가 지급

○ 1회 작업지시 금액 4천만원 미만의 경우 산업안전보건관리비 미집행

Ⅳ		향후 일정

○ 2019. 1월 <발주계약 등록>

- 등록 : 서울계약마당‣계약정보관리‣발주계획관리

○ 2019. 1월 <공사 계약심사 요청 : 본부 안전총괄과>

- 서울시 한시적 계약심사 제외 대상 지정(‘19.1.16 본청 계약심사과)

- 본부 안전총괄과 계약심사 의뢰(‘19.1.23 본부 안전총괄과)

○ 2019. 2월 <입찰공고 및 적격심사 후 계약 : 본청 재무과>

- 기준 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규, 2018. 12월)

○ 2019. 3월 ~ 12월 : 각 정수센터별 설비 안전관리 점검 및 공사 시행

붙임 : 1. 설계시방서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 제품사양서 및 도면 각 1부.

4. 2018년 대비 2019년 설계 비교표 1부.

5. 견적서 3부.

6. 2019년 상수도사업 계약심사 추진계획 알림 공문 1부.

7. 2019년 한시적 계약심사 제외 사업 목록 1부. 끝.