문서번호	설비부-16711
결재일자	2017.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 09/28 권오식
협조
	주무관		유영선

서울바이오허브 조성공사(2단계)’설비분야

관급자재 구매계획 보고

2017. 09.

도시기반시설본부

설비부

‘서울바이오허브 조성공사(2단계)’

관급자재 구매계획 보고

우리 본부에서 추진하고 있는 ‘서울바이오허브 조성공사(2단계)’ 설비 분야 관급자재 발주 관련, 구매계획을 아래와 같이 보고 드림

1		공 사 개 요

공 사 명 : 서울바이오허브 조성공사(2단계)

위    치 : 동대문구 회기로 117-3(舊, 한국농촌경제원)

규모 및 용도

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증축)  : 지하1층/지상4층, 연면적 3,112㎡,  〃

주요설비 : 냉․난방 및 환기설비, 위생 및 소방설비, 지열 및 승강설비                     수배전 및 조명설비, 통신설비 및 태양광설비 등

공사기간 : 착공일로부터 17개월

공 사 비 : 9,270백만원

- 기계  3,136 : 도급 1,301, 관급 1,813, 이설비 등 22

- 전기  4,615 : 도급 2,881, 관급 1,431, 이설비 303

- 통신  1,519 : 도급   622,  관급   897

2		추 진 경 과

2015.  04.: 서울바이오허브 클러스터 조성 발표(경제정책과)

2016.  07.: 설계용역 계약 및 착수

2017. 02.    : 1단계(본관동) 공사 착공

2017. 08.    : 1단계(본관동) 공사 준공

2017. 09.05.: 2단계(본관동) 계약심사 완료

2017. 09.13.: 2단계(신관 및 별관동) 공사 발주 방침

3		관급자재 구매계획

구매 방법 : 조달 발주

관련 규정

- 『조달사업에 관한 법률』 제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

신관 및 별관 품목별 구매 방법

① 신 관 : 도급공사 2018. 9. 준공 예정            (단위 : 백만원)

분 야	품 명	소요예산	계약방법	구매 검토 의견	비 고
기 계	냉난방기(GHP)	200	2단계	단가 계약 제품 구매
	〃(EHP)
	자동제어(전력,조명포함)	197	총액 계약	조달 우수 제품 구매	통합 차수 발주
	엘리베이터	49	3자(다수)	단가 계약 제품 구매
	전열교환기	41	〃	〃
	전기복사패널	4	3자 단가	〃
	계	491
전 기	수배전반	334	총액 계약	조달 우수 제품 구매
	에너지저장장치	355	총액 계약	조달 총액(일반)
	비상발전기	153	3자 단가	단가 계약 제품 구매
	조명등기구	78	〃	〃
	계	920
통 신	통합배선반	142	총액 계약	조달 우수 제품 구매
	방송설비	134	〃	〃
	CCTV	91	〃	〃
	통신네트워크장비	136	3자 단가	단가 계약 제품 구매
	계	503

② 별 관 : 도급공사 2019. 2. 준공 예정          (단위 : 백만원)

분 야	품 명	소요예산	계약방법	구매 검토 의견	비 고
기 계	냉난방기(EHP)	133	다수공급자	단가 계약 제품 구매
	자동제어(전력,조명포함)	495	총액 계약	조달 우수 제품 구매	통합 차수 발주
	엘리베이터	127	2단계	단가 계약 제품 구매
	전열교환기	41	3자(다수)	〃
	전기복사패널	5	3자 단가	〃
	공기조화기	79	〃	〃
	지열 설치	442	총액 계약	조달 우수 제품 구매	차수 발주
	계	1,322
전 기	수배전반	285	총액 계약	조달 우수 제품 구매
	조명등기구	67	3자 단가	〃
	태양광발전	63	〃	〃
	주차관제	96	〃	〃
	계	511
통 신	통합배선반	52	총액 계약	조달 우수 제품 구매
	방송설비	187	〃	〃
	CCTV	77	〃	〃
	통신네트워크장비	78	3자 단가	단가 계약 제품 구매
	계	394

보고자 의견

- 신관 및 별관 도급공사 준공 예정일이 서로 상이(신관 ‘18.9. 별관 ‘19.2.)하므로,         관급자재 발주 예산의 효율적 집행 및 납품의 원활한 공정 관리를 위하여         신관 및 별관 관급자재를 분리하여 발주 시행함이 타당할 것으로 판단됨.

※ 자동제어와 지열의 경우 신관 및 별관의 원활한 공정 및 통합관리를 위해         일괄 차수 발주 시행

4		향 후 계 획

2017.  09.~2018.02.: 신관 및 별관동 관급자재 발주 및 계약

2018. 09. : 신관동 납품완료.

2019. 02. : 별관동 납품완료.  끝.