투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-5107호(2018. 3. 26.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역

2) 용역규모

가) 구룡사거리 : 구룡교 확장 폭6m, 연장300m

나) 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭4차로, 연장540m

다) 월드컵로 : 월드컵파크3단지교차로~월드컵경기장교차로(양측 2차로 확장)

3) 계약기간 : 2017. 5. 10.~2018. 3. 30.

4) 용 역 비 : 1,247,900,000원

5) 계 약 자 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜도진엔지니어링

나. 준공기한 연기 : 62일

1) 계약기간 : 당초 '17. 5. 10.~'18. 3. 30.⇒ 변경 '17. 5. 10.~'18. 5. 31.

2) 귀책소재 : 서울특별시

3) 지체상금 : 미 부 과

4) 연기사유 : 설계VE 요청(토목부-649,′18. 1. 10.)에 대하여 LH공사에서 설계VE 워크샆을′18. 4. 2.(인천파주단지사업1부-831호,′18. 3. 8.) 실시함에 따라 설계VE 반영 및 관련기관 협의 등 실시설계에 소요되는 2개월 공기연장 필요

다. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 제2자유로 종점부 입체화 실시설계 용역 -준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 설계감리자 준공기한 연기요청에 대한 검토 의견 1부.

4. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	토목부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	안규홍		토목부장	03/27 김영수
협조자
시행	토목부-5118	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개