투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 수량 변경 및 납품기한 연기의뢰(2018 지방폐교활용 가족자연체험시설)

1. 시설과-2975(2018.11.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『2018 지방 폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사』와 관련하여 아래와 같이 관급자재 수량변경 및 납품기한을 연기 하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 2018 지방 폐교활용 가족자연체험시설 조성공사 관급자재 구매

나. 관급자재 현황

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량		금액(원)		비 고
				기존	변경	기존	변경
22517233	목재판재	T21(말라스)	㎡	459	505	20,196,000	22,220,000
22415168	안내판	1,200x800	개	1	1	3,780,000	3,780,000	변경없음
22415654	안내판	H3,000	개	1	1	3,050,000	3,050,000	변경없음

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2018.11.30.(목재판재, 안내판)

- 변 경 : 2018.12.21.(목재판재, 안내판)

라. 연기사유 : 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 실정사항 검토 보고서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	代김재희		시설과장	11/21 진병규
협조자
시행	시설과-2977	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개