투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	법무법인 넥서스 대표
(경유)
제목	9호선3단계 건설공사 추가 공사비(간접비) 적정성 검증결과 제출

1. 귀 법무법인 넥서스의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 법무법인 넥서스와 우리시 간 「서울지하철 9호선 3단계 건설사업 공기연장에 따른 추가공사비(간접비) 적정성 검증」협약 체결(2018.8.3.)과 관련한 사항에 대하여는  서울시에서 소송 중에있는「지하철 7호선연장 공사대금(간접비) 청구」소송 대법원 판결(2018.10.30.)을 기준으로 하여 검증작업 결과물을 작성한 후 과업을 종결코자 하오니, 그 동안 추진하였던 검증작업에 대하여 상기 기준으로 결과물을 작성하여 제출하여 주시고, 제공되었던 자료는 우리시로 반환하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 검증 비용은 상기 대법원 판결일을 기준으로 하되, 결과물 작성 및 검토기간 14일을 포함하여 협약서 제10조에 의거 일할로 계산하여 정산코자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김용선		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	12/27 정대현
협조자	주무관	엄상민		주무관	노권호
시행	도시철도토목부-15140	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7211	/전송	02-772-7306	/	kysys2@seoul.go.kr	/	대시민공개