문서번호	설비부-4505
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		여인웅	03/29 임정규
협 조

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』 물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC 1회) 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC) 정산 보고

물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC1회) 건에 대하여 정산(보험료 및 각종 수수료) 후 아래와 같이 계약금액을 조정하고자 검토하고 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

○ 공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L) + 비총인 416,000㎥ /일(TP 0.8㎎/L)  ⇒  혼합방류 T-P 0.46mg/L 이하

○ 공사기간 : 총차 17.11.27~20.01.26(2차 18.10.10~20.01.26)

○ 공사금액 : 총차 2,393,136,000원(2차 1,618,136,000원)

○ 시 공 사 : 영풍진흥기업㈜

○ 감 리 사 : ㈜천일

2		관련 근거(ESC)

□ 관련 법규 및 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법률 시행령 제73조

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청

- 영풍중랑 제2019-01호(`19.01.14)

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토(건설사업관리단)

- 중랑감 제19-35(2019.01.18) : 제1회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건  검토 보고

○ 물가변동으로 인한 계약금액 재검토 보고(건설사업관리단)

- 중랑감 제19-122(2019.03.25) : 제1회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건  재검토 보고

3		물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC 1회) 정산 내용

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(ESC 1회) 정산 검토 내용

○ ESC 1회 정산 총괄표                                    (단위 : 원)

구 분		ESC 1회		비고
		당 초	변 경
□물가변동 대상공사의 계약금액(B)		2,299,500,000	2,299,500,000
□물가변동 제외금액(C)		758,126,000	848,009,000
㉮물가변동 조정기준일 (현재공정율)	예정공정율	30.058%	30.058%
	실행공정율	33.431%	33.431%
	기성공정율	29.326%	29.326%
	제외공정율	33.431%	33.431%
□물가변동 적용대가(D)		1,541,374,000	1,451,491,000
□물가변동 조정율(%)-(A)		5.86%	5.86%
□물가변동등락 대상조정금액(G)		90,324,000	85,057,000
□선급금 공제금액(F)		-	-
가. 선급금 지급일		-	-
나. 선급금 금 액		-	-
다. 선급금 지급비율(E)		-	-
□물가변동 조정 적용금액		90,324,000	85,057,000	감)5,267,000

○ 물가변동 적용대가 집계표                                       (단위 : 원)

구 분			계약금액	물가변동 적용대가		비고
				당 초	변 경
순공사원가	노무비		900,362,855	652,342,048	652,342,048
	재료비		872,709,782	533,571,413	533,571,413
	경비	기계경비	22,664,062	14,560,988	14,560,988
		산재보험료	35,114,151	25,441,340	25,441,340
		고용보험료	7923,193	5,740,610	5,740,610
		건강보험료	13,839,212	10,026,957	-	정산
		연금보험료	20,270,375	14,686,543	-	정산
		노인장기요양보험	906,468	656,765	-	정산
		퇴직금공제	18,723,639	13,565,883	-	정산
		안전관리비	46,879,132	29,399,113	-	정산
		환경보전비	8,547,225	5,689,767	-	정산
		기타경비	106,384,358	71,154,808	71,154,808
		건설기계대여금 지급보증서 발급	8,376,281	5,575,972	-	정산
		건설하도급대금 지급보증서 발급	1,384,650	921,742	-	정산
소 계			2,064,085,383	1,383,333,949	1,302,811,207
일반관리비			20,640,853	13,833,339	13,028,112
이 윤			5,728,310	4,081,803	3,697,953
[공급가액]			2,090,454,546	1,401,249,091	1,319,537,272
부가가치세			209,045,454	140,124,909	131,953,728
[도급금액]			2,299,500,000	1,541,374,000	1,451,491,000	감)89,883,000

□ 계약금액 변경 내역

구 분	변경 전(원)	ESC1회	변경후(원)	증·감(원)	비 고
총 차	2,299,500,000	85,057,000	2,384,557,000	85,057,000
1 차	775,000,000	0	775,000,000	0	준공 (′18.9.30)
2 차	1,524,500,000	85,057,000	1,609,557,000	85,057,000	향후 정산

4		책임건설사업관리기술자 검토 의견

□  계약일로부터 조정기준일이 90일 이상 경과(계약일로부터 284일)되었고

지수조정율(K값)이 100분의3 이상(5.86%)되는 비교시점(2018.9.1.)을

조정기준일로 적용하여 물가변동으로 인한 조정요건이 충족됨

□  제외대상 공정율은 예정공정표 및 ONE-PMIS보고서 등 공정율을 비교 검토하여 높은 공정율(실적공정율 33.431%) 적용하였는 바 타당함

□  물가변동 적용대가 및 지수산출 등이 관련규정에 따라 적정 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 조정함이 타당하다고 판단됨

5		보고자 조치의견

□  기계설비공사 계약자가 신청한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청내용에 대한 책임건설사업기술자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 계약금액의 조정을 승인하고

□ 추후 설계변경시 금번 계약금액 조정 내용이 반영될 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 업무지시하고자 함

따로붙임 1) 물가변동 기술검토의견서(책임 건설사업기술자) 1부.

2) 조정 보고서 1부.  끝.