＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	행정관리팀장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(2018년 토목, 건축 시설물 유지보수공사)

1. 정수시설과-2948(2019.3.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 시행 중인 “2018년 광암아리수정수센터 토목, 건축 시설물 유지보수공사(2차수)”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 광암아리수정수센터 토목, 건축 시설물 유지보수공사

나. 계 약 자 : *************

다. 계약기간 : (총차) 2018. 05. 04. ~ 2019. 03. 31.

(2차) 2019. 01. 01. ~ 2019. 03. 31.

라. 계약금액 : (총차) 금110,478,000원

(2차) 금10,478,000원

마. 변경사항 : 물량 증감에 따른 내역변경(계약기간 및 계약금액 변경 없음)

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙  임 1. 설계변경 보고서 및 설계변경 심의결과 보고서 1부.

2. 변경 계약내역서(총차, 2차수) 각 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	신중선		정수시설과장	03/29 남효돈
협조자	주무관	김덕기
시행	정수시설과-2969	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5382	/전송	02-3146-5309	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	부분공개(5)