문서번호	설비부-4507
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	03/29 임정규
협조

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재 변경계약 및 납품기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재 변경계약 및 납품기한 연기보고

『노들섬 특화공간조성 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재 변경계약(경관조명) 및 납기연기(무정전전원장치외 4건)에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.5.15.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜코에버정보기술 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.03.15. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사 관급자재(무정전전원장치, 무대조명) 납품기한 연기요청[유탑노들 제19-92호)

○ `19.03.27. : 전기공사 관급자재(자동승강조명장치, 비상발전기) 납품기한 연기요청[유탑노들 제19-115호)

○ `19.03.27. : 전기공사 관급자재(경관조명) 계약금액 변경 및 납품기한 연기요청[유탑노들 제19-115호)

□ 관급자재 계약 현황

품 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액	납품기한	비고
무정전전원장치	*********** **************	*********	**********	2019.05.20
무대조명장치	************* *************	*****	***********	2019.05.30
자동승강조명장치	*********** **************	****	**********	2019.05.15
투광조명	*********** **************	****	**********	2019.05.15
디젤발전기	*********** **************	********	**********	2019.05.20
거주로조명설비	*********** **************	***	*********	2019.05.15

□ 관급자재(거주로조명설비) 계약 변경내용

○ 변경사유 : 등기구 사각타입에서 원형타입으로 변경에 따른 취소

○ 변경 내용*************

(금액단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비 고
거주로조명설비	보안등기구20W*4	개	*	*******	*********	당초
			*		*	변경
거주로조명설비	보안등기구60W	개	*	*******	*********	당초
			*	*******	*********	변경
합 계		식			*********	당초
					*********	변경

※ 향후 원형등기구로 구매예정

□ 납품기한 연기 현황

○ 사 유 : 건축공사기간 연기(2019.8.31.)에 따라 후속공정인 전기공사 공정 미도래로 관급자재 납품시기 연기 필요.

○ 연기 현황

품 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
무정전전원장치	*********** **************	*********	2019.05.20	2019.08.31

품 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
무대조명장치	************* *************	*****	2019.05.30	2019.08.30	총액
자동승강조명장치	*********** **************	****	2019.05.15	2019.08.30
투광조명	*********** **************	****	2019.05.15	2019.08.30
디젤발전기	*********** **************	********	2019.05.20	2019.08.30
거주로조명설비	*********** **************	***	2019.05.15	2019.08.31

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 운영자 요청 및 동측 공사기간 연장 변경에 의거 선행공정 일정에 따른 관급자재 납품기한 연장 및 등기구 타입이 사각에서 원형으로 변경에 따른 취소 및 금액변경이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단의 관급자재 변경계약 및 납품기한 연기 요청사항 검토 결과 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 변경 및 납품기한 연기하고자 하며, 총무부에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 3부.  끝.