문서번호	기전과-1852
결재일자	2019.4.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	04/01 代송기영
협조
	주무관		김현태

난곡터널 조명 개선공사(하행) 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

남부도로사업소

(기  전  과)

난곡터널 조명개선공사(하행) 추진 계획

난곡터널 조명등 교체(하행) 및 보행로 조명설치 추진계획을 수립, 시민에게 안전한 조명환경 제공 및 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

1		사업개요

□ 추진근거

○ 2019년 도로기전시설물 유지관리계획(기전과-174, 2019. 1.11.)

□ 시설현황

구분	연장	터널조명	CCTV	비상벨	소화기	비고
상행	374M	LED100W×160등 LED200W× 64등	3	6	24
하행	366M	NH 250W×262등	7 (보도 3개 포함	6	24

□ 주요 사업내역

○ 터널조명 개선(하행) : NH 250W×262등 ⇒ LED 100W×162등

LED 200W×48등

○ 보행로 조명등 설치 : LED방습등 40W×148등(상,하행)

○ 조명배전반 교체 2면

□ 사업예산 :금 460,000천원

○ 도로시설물 노후조명개선 (난곡터널 하행) : 400,000천원

○ 터널및지하차도 보행로 조명등 개선(난곡) :   60,000천원

□ 사업 추진방향

○ 기존 터널등(나트륨등)은 LED로 교체 설치

○ 케이블(하행 전체) 교체, 케이블트레이는 재사용

○ 터널 및 지하차도 보행로 조명 개선 예산(60백만원) 은 보행로 LED조명등 관급자재 구매에 사용

○ 보행로 조명 밝기는 150LUX 이상으로 설치

위치도	관련사진

2		추진계획

〔터널 및 보행로 조명 공사〕

○ 사 업 명 : 난곡터널 조명개선공사(하행)

○ 총 사업비 : 금409,488천원

(도급비 270,740천원, 관급자재비138,748천원)

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비

○ 공사발주 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 공사기간 : 착공일로부터 90일

○ 하자기간 : 준공검사일로부터 1년

○ 공사 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업면허 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일 까지 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

〔관급자재 구매〕

○ LED 터널등

- 구매내역 : LED100W×162등, LED200W×48등

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 제품선정 : 하자 및 터널조명의 유지관리 연속성을 위해 2018년 난곡터널 조명개선공사(상행)에서 구매설치한 동일 제품 구매

(2018년 제품선정위원회에서 선정한 제품임)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비

○ LED 보행등

- 구매내역 : LED방습등 40W×148등

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 제품선정 : 보행로 조명 시뮬레이션 결과 요구 조도(150LUX) 이상 업체제품 구매

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 터널 및 지하차도 보행로조명등개선, 시설비

○ 배전반

- 구매내역 : 배전반 2면

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 제품선정 : 조달 우수제품 중에서 구매

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비

○ 터널조명제어기

- 구매내역 : 터널 조명제어기 1대

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 제품선정 : 터널 조명제어기 유지관리를 위해 2015년 이후 터널 및 지하차도 조명제어에 설치된 동일제품 구매

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설 개선, 시설비

3		추진일정

○ 2019. 4.	추진계획 수립 및 계약심사 의뢰
○ 2019. 4.	공사발주
○ 2019. 4.~6	공사 시행
○ 2019. 7	공사 준공

4		향후계획

○ 계약심사 완료 후 도로시설과 예산 재배정 요청(410백만원)

○ 공사 완료 후 준공도면 작성

붙임 : 난곡터널 조명개선공사(하행) 설계 내역서 1부.  끝.