＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 측량의뢰(개량-143, 성동구 *****************), 변경

1. 급수운영과-6526(2019. 3. 21)호와 관련한 내용입니다.

2. 우리 과에서 시행하는 ****************************** 개량-143의 변경사항에 대하여 착공 전, 붙임과 같이 변경 측량의뢰하고자 합니다.

가. 공사번호: *********8

나. 공 사 명: ****************************

다. 지시번호: 개량-143

라. 공사위치: 성동구 *****************

마. 계약기간: 2019. 3. 25.~2019. 4. 19.

바. 공사예정: 2019. 4. 4.~2019. 4. 19.

사. 시 공 자: *****************************

아. 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사개요	D=80mm, L=30m	D=80mm, L=54m

자. 변경사유: 확인굴착 결과 GIS와 상이하여 공사위치 및 작업내용 변경.

붙임  측량의뢰서 1부.  끝.

주무관							최진혁			주무관					이훈재					급수운영과장					04/01 송근호
협조자				주무관						이선옥
시행			급수운영과-7374									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2837						/전송			02)3146-2789					/													/	부분공개(5)