문서번호	방재시설부-4451
결재일자	2019.4.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		조성만	04/01 이임섭
협 조

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

겐트리크레인 기초누락 반영 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

겐트리크레인 기초누락 반영 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

현재 진행 중인 「반포천 유역 분리터널 건설공사」 와 관련하여 기 설계사항 중 겐트리크레인 기초가 누락되어있어 원활한 공사진행을 위하여 이를 반영한 사항에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 반포사관 제2019-114호(2019. 3. 20.)

- 겐트리크레인 설계 기초누락사항 반영관련 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사

○ 공사위치 : 서초구 법원로10 ~ 서초구 사평대로 240 일원

○ 공사규모 : 유역 분리터널(▣4.5m×4.5m ~ D6.5m, 연장1,162m)

○ 공사기간 : 2018. 2. 1. ~ 2021. 1. 30.

○ 도 급 비 : 337억원

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사

Ⅲ		보고 내용

○ 현황 및 문제점

- 겐트리크레인 필요성 : 수직구 굴착 후 터널굴진 시 발생하는 토사반출 및 자재 장비 등 운반

- 문제점 : 기 설계내용에 겐트리크레인 레일설치를 위한 기초누락

○ 겐트리크레인 기초 반영

- 겐트리크레인 현황

모식도

- 기초반영

구분	당 초	변 경
공사현황	기초관련 도면 누락	겐트리크레인 기초보강상세도 겐트리크레인 기초공사를 위한 도로점용사항반영(서초경찰서)

- 주요수량 증·감현황

구 분	단위	당초(a)	변경(b)	증.감 (c=b-a)	비 고
- 터널부
기존구조물 철거
콘크리트+아스콘	㎥	-	229	229
아스팔트포장절단	m	-	84	84
터파기	㎥	-	164	164
되메우기	㎥	-	164	164
콘크리트 타설 (철근+무근)	㎥	-	191	191
합판거푸집 (4회,6회)	㎡	-	388	388
강관비계	㎡	-	128	128
교통신호수	일	-	120	120	서초경찰서 도로신고 협의
교통안내표지판	개소	-	2	2	서초경찰서 도로신고 협의
경광등	개소	-	2	2	서초경찰서 도로신고 협의
레일받침 (겐트리크레인)	ton	-	8.046	8.046
레일가이드 (겐트리크레인)	식	-	1	1
철근가공조립	ton	-	31.095	31.095
아스콘포장 (표층,기층)	a	-	1.564	1.564
- 관급자재
레미콘(25-27-15)	㎥	-	184	184
레미콘(25-18-08)	㎥	-	10	10
철근[D13mm]	ton	-	0.785	0.785
철근[D16mm]	ton	-	6.617	6.617
철근[D16mm]	ton	-	6.617	6.617
아스콘(표층)	ton		19.0	19.0
아스콘(기층)	ton		75.0	75.0

○ 공사비 증·감

(단위 : 천원)

구 분	단위	수량	당 초	변 경	증·감		비고
□직접공사비	식	1	-	59,890	증)	59,890
제 경 비	식	1	-	20,765	증)	20,765
소 계	식	1	-	80,655	증)	80,655
부 가 세	식	1	-	8,065	증)	8,065
도급공사비	식	1	-	88,720	증)	88,720
관급자재비	식	1	-	38,450	증)	38,450
총공사비	식	1	-	127,170	증)	127,170

※ 적용단가 : 협의율 적용[협의율=(100+87.595)/2=93.798%]

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 검토결과 개략공사비 단가적용은 기존공종은 도급계약단가를 적용하였고, 신규비목(겐트리크레인 레일가이드)은 협의율(93.798%)을 적용하여 적정하게 산출되었으며, 기초 설계누락에 대하여 설계변경 시 추가 반영함이 타당하다고 판단됨.

Ⅲ		보고자 의견

○ 실정보고 검토결과 겐트리크레인 기초 누락반영은 적정하다고 판단되는 바, 이를 승인처리하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.