문서번호	도로보수과-1513
보존기간	년
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		유재필	04/01 신상식
협조	주무관		구준서
	주무관		최우람

서울형 친환경 도로포장 추진 계획

2019. 4. 1.

성동도로사업소

도로보수과

서울형 친환경 도로포장 추진 계획

최근 미세먼지 증가, 교통소음, 폭염에 의한 도시열섬화등 급변하는 기후 환경 변화에 대응코자 미래지향적 친환경 포장 예산이 배정됨에 따라 대상 사업구간을 선정 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 도로관리과-3789(2019.3. 6.) : 서울형 친환경 도로포장 종합계획

○ 도로관리과-4177(2019.3.12.) : 서울형 친환경 도로포장 예산 재배정알림

□ 사업규모

○ 예 산 액 : 733백만원

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로관리시설물 관리, 도로 및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사(도시개발특별회계), 시설비및부대비, 시설비

○ 예산 재배정 현황                                   (단위:백만원)

친환경 포장명	재 배 정 액	비 고
배수성 ․ 저소음포장	300	수막현상 제거로 우천시 차량 주행성 향상 및 도로소음저감
비배수성 ․ 저소음포장	100	미세먼지 및 도로소음저감
중온 아스팔트포장	333	미세먼지대응
계	733

□ 추진계획

○ 사업 대상 구간 선정

친환경 포장명	위 치	규 모	개략공사비(백만원)	선 정 사 유	비고
배수성 저소음 포장	서울시립대로 (청계한신휴플러스교차로 ~ 전농1동교차로)	B=16~20m L=500m A=80a (t=10cm)	330	-아파트단지(4개단지)구간으로 소음저감 효과 극대화 가능 -직전포장년도 : 2012년 -SPI지수 : 4.41	노후포장도로정비공사(1구역)
비배수성 저소음 포장	봉화산로 (중랑구청사거리 ~ LG쌍용아파트입구)	B=15m L=515m A=78a (t=2cm)	120	-아파트(2개단지) 및 초․중․고교, 관공서 구간으로 소음저감 효과 극대화 가능 -직전포장년도 : 2013년 -SPI지수 : 4.87	노후포장도로정비공사(2구역)
중온아스팔트포장	광나루로 (용비교~응봉교)외 5개소	A=353a 6,340톤	283	2019년 노후포장도로 정비공사(1,2구역) 대상구간중 기층계획구간에 중온재생기층재 사용	노후포장도로정비공사(1,2구역)
계			733

○ 세부추진계획

- 친환경포장중 배수성․저소음 및 비배수성․저소음포장은 기계포장이 가능한 노후포장도로 정비공사(1구역, 2구역)건에 각 1건씩 시공

․ 배수성 ․ 저소음포장 : 2019년 노후포장도로 정비공사(1구역)

자재구매 방법 : 배수성 아스팔트 총액구매

․ 비배수성 ․ 저소음포장 : 2019년 노후포장도로 정비공사(2구역)

자재구매 방법 : 비배수성 아스팔트는 특허로 1인 수의계약

- 중온아스팔트 포장은 당초 2019년도 노후포장계획 구간중 기층재 포설예정구간에 중온재생 기층재를 조달총액 구매하여 사용

․ 중온 아스팔트 포장 : 2019년 노후포장도로 정비공사(1,2구역)

자재구매 방법 : 기층포장재 구매시 중온첨가제를 사용한 제품(중온, 순환아스팔트, BB-2) 총액구매

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 각 공사별 친환경 포장건에 대하여 우선 자재구매 소요시간 등을 감안하여 우선 사업시행하고 추후 설계변경에 반영하여 정산처리코자 함

□ 행정사항 및 향후계획

○‘19. 4. : 친환경 도로포장 대상 선정

○‘19. 5. : 친환경 포장 자재 구매 및 자재 공급원 승인

○‘19. 6. : 공사별 친환경 포장공사 시행

○‘19. 8. : 친환경 포장공사 완료후 관리대장 작성 제출

※ 친환경 포장구간 모니터링 및 장기 공용성 추적조사는 도로관리과 포장조사평가팀에서 용역 시행 예정

붙임 1) 친환경포장 대상구간 현황 및 위치도 각 1부,

2) 저소음 포장 관리대장 1부.  끝.