문서번호	도시철도사업부-3066
결재일자	2019.4.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		신교통과장	도시철도사업부장
박성준		성원배	04/01 최병훈
협조
	주무관		박노성

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 』

휴일 작업계획 승인 검토보고(‘19.4월)

2019. 4.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』

2019. 4월 휴일 작업계획 승인 검토 보고

별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 관련 4월 휴일기간중 작업계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 작업승인 요청 내용

○ 근  거 : 별내 감1-19-176호(2019.03.27.)

쌍건별내 제2019-123호(2019.03.27.)

○ 작업일 : 총 4일【 4. 6(토)/ 4.13(토)/ 4.20(토)/ 4.27(토)/】

□ 휴일 작업계획

○ 관련근거

- 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)

- 공사시방서 4.1.9(산업보건상의조치) 마.(근로시간 연장의 제한)

- 건설사업관리용역 과업내용서 6.3(휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

- 휴일작업 현장관리 개선방안 [도시철도토목부-10729호('13.11.15.)]

‣ 휴일근무 건설사업관리기술자 대가는 귀책사유에 따라 계약상대자가 지급

⇨ 검토의견 : 건설사업관리기술자의 휴일근무 대가는 서울특별시 공사계약

특수조건 제11조에 따라 계약상대자 부담

○ 휴일작업 사유

-  작업의 연속성 확보 및 원활한 공정 추진을 위해 지속적 공사추진과 공사관리를 위한 건설사업관리기술자 근무 필요

○ 휴일근무 적정성 및 비용부담

-  휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도 토목부-10681, ‘13.11.14.)

□ 휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇒ 시공사 귀책은 시공사 대가 지급

-  건설사업관리 기술단 검토의견

□ 휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 명기

○ 근로기준법 근로시간 준수여부(52시간) : 적정(대체근무 시행)…붙임 1

○ 건설사업관리단 검토의견

-  현재 정거장 및 본선구간의 굴착 및 가시설작업 등이 진행되고 있어 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단되며,

- 건설사업관리기술자의 대체휴무는 업무대행자를 지정하여 용역수행에 차질이

없도록 만전을 기하겠음

○ 휴일작업 주요내용

작 업 일	작업 위치	작 업 내 용	관리자
			건설사업 관리기술자	시공사
4월06일 (토)	본선1-1 본선1-2 정거장	본선1-1구간 좌측파일 줄파기작업 본선1-1구간 좌측파일 천공 및 항타 본선1-2구간 토공 반출작업 본선1-2구간 띠장 및 버팀 설치 본선1-2구간 강재토류판 설치 정거장구간 토공 반출작업 정거장구간 주형보 및 복공판 설치 정거장구간 하수박스 이설작업	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
4월13일 (토)	본선1-1 본선1-2 정거장	본선1-1구간 좌측파일 줄파기작업 본선1-1구간 좌측파일 천공 및 항타 본선1-2구간 토공 반출작업 본선1-2구간 띠장 및 버팀 설치 본선1-2구간 강재토류판 설치 정거장구간 토공 반출작업 정거장구간 주형보 및 복공판 설치 정거장구간 하수박스 이설작업	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
4월20일 (토)	본선1-1 본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-1구간 좌측파일 줄파기작업 본선1-1구간 좌측파일 천공 및 항타 본선1-2구간 토공 반출작업 본선1-2구간 띠장 및 버팀 설치 본선1-2구간 강재토류판 설치 정거장구간 토공 반출작업 정거장구간 주형보 및 복공판 설치	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
4월27일 (토)	본선1-1 본선1-2 정거장	본선1-1구간 중앙파일 줄파기작업 본선1-1구간 중앙파일 천공 및 항타 본선1-2구간 토공 반출작업 본선1-2구간 띠장 및 버팀 설치 본선1-2구간 강재토류판 설치 정거장구간 토공 반출작업 정거장구간 주형보 및 복공판 설치	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

○ 건설사업관리기술자 근무계획

구분	근무일자	근무시간	근무자	대체 휴무계획		비고
				대체휴무일	업무대행자
휴일작업	4월06일(토)	09:00 ~ 18:00	******	4월 12일(금)	******
	4월13일(토)	09:00 ~ 18:00	******	4월 19일(금)	******
	4월20일(토)	09:00 ~ 18:00	******	4월 26일(금)	******
	4월27일(토)	09:00 ~ 18:00	******	5월 3일(금)	******

□ 검토 결과

○ 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일작업 조건 및 업무지시를 부여하여 휴일작업 계획을 승인코자 함.

- 휴일작업 승인 조건

․휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자(감리원) 대가는 휴일작업계획의 적정성 여부 검토의견서와 같이 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)에 따라 지급

․소음 · 먼지 · 통행불편 등 민원이 발생하지 않도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의

․휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 업무 지시

․건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 검수, 안전관리, 민원관리, 비산먼지 저감대책 등 철저

․건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

․휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업 시행토록 할 것

․사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련 절차에 따라 상황 보고토록 할 것

․작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

․개착구간 도로안전시설물 관리 및 교차로, 횡단보도 구간 안전관리 철저

․건설기계 및 중량물 취급 작업시 감리 확인 및 안전수칙 준수 철저

․휴일작업 시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

․풍수해 대비 안전사고 및 민원이 발생되지 않도록 관리 철저

․소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원이 발생하지 않도록  관리철저

․‘건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목’ 준수 철저

붙  임 : 검토의견서 및 관련공문 각 1부. 끝.