＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수공사 연기 통보(홍제동 92-*)

「홍제1동 외 13개동 상수도공사」와 관련하여 아래와 같이 통보하오니 공사시행 시 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 위치 : ********, ****

나. 작업지시 번호 : 신설-90

다. 연기 사유 : 도로 및 대지 경계 미확정 상태로 공사 연기 요청

라. 변경내역

1) 당초 공사기간 : 2019. 3. 26. ~ 2019.  4. 05.

2) 변경 공사기간 : 2019. 3. 26. ~ 2019.  4. 23.

붙임 : 공사연기원 1부.  끝.

							서부수도사업소장
수신자					(주)이준엔지니어링,덕부건설(주)
주무관							배한기			급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					04/04 이병운
협조자
시행			급수운영과-6187									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-3654						/전송			02-3146-3689					/													/	부분공개(6)