문서번호	방재시설부-4744
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	04/04 이임섭
협조	치수시설과장		조성만
	주무관		한승균

- 서초역~방배로간 도로개설공사 - 조경공사(식재 및 시설물) 계획 변경에 따른 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 서초역~방배로간 도로개설공사 -

공사 시점구간 지장수목 이식제거 실정보고

『서초역~ 방배로간 도로개설공사』추진 중 공사 시점부 연장에 따른 터널상부 조경식재 주민요구사항 반영과 조경수 및 시설물 유지관리 주체인 서초구청과 협의결과를 공사에 반영한 실정 검토 보고임.

※ 관련공문 : 조경공사(식재 및 시설물) 계획 변경에 따른 실정보고(서방관리 제19-188호/2019.3.26)

공사개요

○ 공 사 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사

○ 사업기간 : 2015.10.20. ~ 2019.04.30.

○ 규    모 : 도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km

(터널 400m포함)

○ 공 사 비 : 47,890백만원(조경 916백만원)

○ 시 공 사 : 롯데건설㈜

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

감리단 실정내용 및 검토의견

○ 주요변경 내용

- 공사 시점부 터널 연장에 따른 터널상부 식재면적 증가 반영

․터널연장 변경(355m→400m)

․터널시점상부 식재면적 증가(1,698㎡→2,673㎡)

- 민원사항 반영

․공사 시점부 장송반영(50주)

․공사 종점부 정자 위치변경(1개소)

- 서초구청 요청사항 반영

․가로수 수종변경(느티나무, 은행나무→이팝나무)

․공사 종점부 중앙분리대 및 띠녹지 : 관목, 초화류 종류 변경 및           보강 식재 반영

○ 가로수 식재계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
가로수 (시점부)	느티나무	H4.0×R12	주	27	-	-27
		H4.0×R20	주	6	7	1
	이팝나무	H4.0×R15	주		56	56
	계		주	33	63	30
가로수 (종점부)	은행나무	H4.0×B10	주	52		-52
	이팝나무	H4.0×R15	주		69	69
	계		주	52	69	17

○ 띠녹지구간 식재계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
띠녹지	소나무	H6.0xW3.0xR30	주	12	-	-12	기존 (감소)
	소나무	H5.5xW2.5xR25	주	23	-	-23
	회양목	H0.3xW0.3	주	4,000	800	-3,200
	사철나무	H1.0×W0.3	주	-	7,845	7,845	옹벽 (측구)
	청단풍	H3.5×R12	주	4	-	-4	기존 (감소)
	백철쭉	H0.3×W0.3	주	1,300	-	-1,300
	산수국	H0.3×W0.4	주	550	-	-550
	산철쭉	H0.3×W0.3	주	8,400	2,200	-6,200
	낙상홍	H1.0×W0.4	주	250	-	-250
	황매화	H1.0×W0.4	주	450	-	-450
	흰말채나무	H1.0×W0.4	주	200	-	-200
	화살나무	H0.6×W0.3	주	1,950	2,225	275
	남천	H1.0×3가지	주	-	1,655	1,655	신규 (반영)
	개쉬땅	H1.0×W0.4	주	-	175	175
	자산홍	H0.3xW0.3	주	-	100	100
	구절초	8cm	본	-	480	480	위치 (조정)
	돌단풍	10cm	본	-	320	320
	수호초	10cm	본	-	990	990

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
띠녹지	비비추	2-3분얼	본	-	1,860	1,860	위치 (조정)
	옥잠화	10cm	본	-	420	420	신규 (반영)
	후룩스	8cm	본	-	700	700
	맥문동	3-5분얼	본	-	6,080	6,080
	휴케라	10cm	본	-	400	400
	억새‘리틀제브라’	10cm	본	-	420	420
	샤스타데이지	8cm	본	-	550	550
	홍띠	10cm	본	-	410	410
	황금조팝	10cm	본	-	410	410
	가우라	8cm	본	-	320	320
	해국	8cm	본	-	320	320
	에키네시아	8cm	본	-	480	480
	은사초	10cm	본	-	520	520
	꿩의비름	8cm	본	-	340	340
	리아트리스	10cm	본	-	450	450
	무늬호스타	20cm	본	-	330	330
	그린라이트억새	10cm	본	-	320	320
	은쑥	10cm	본	-	420	420
	담쟁이	(L0.3)	본	-	750	750
	계			17,139	32,290	15,151

○중앙분리대구간 식재계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
중앙분리대	소나무	H6.0xW3.0xR30	주	5	5	-	기존 (감소)
	소나무	H5.5xW2.5xR25	주	11	11	-
	소나무(둥근형)	H1.0xW1.2	주	15	-	-19
	회양목	H0.3xW0.3	주	1,900	-	-1,900
	청단풍	H3.5×R12	주	11	9	-2
	산딸나무	H3.0×R8	주	6	-	-6	위치 규격 (조정)
	산딸나무	H3.5×R12	주	-	14	14
	선주목	H2.0×W1.0	주	19	-	-19	기존 (조정)
	사철나무	H1.0×W0.3	주	550	550	-
	비비추	2-3분얼	본	3,200	2,300	-900
	맥문동	3-5분얼	본	-	6,850	6,850	관급
	꿩의비름	8cm	본	-	280	280	신규 (반영)
	은사초	10cm	본	-	250	250
	홍띠	10cm	본	-	250	250
	리아트리스	10cm	본	-	280	280
	에키네시아	8cm	본	-	320	320
	해국	8cm	본	-	450	450
	무늬호스타	20cm	본	-	380	380
	샤스타데이지	8cm	본	-	280	280
	가우라	8cm	본	-	350	350
	그린라이트억새	10cm	본	-	280	280
	억새‘리틀제브라’	10cm	본	-	320	320
	은쑥	10cm	본	-	320	320
	휴케라	10cm	본	-	280	280
	황금조팝	10cm	본	-	350	350
	눈주목	H0.3xW0.3	주	-	700	700
	돌단풍	10cm	본	-	650	650
	산수유	H0.3xR10	주	-	12	12
	자산홍	H0.3xW0.3	주	-	1,000	1,000
	수호초	10cm	본	-	800	800	위치 (조정)
	원추리	2-3분얼	본	-	900	900
	계			5,717	18,191	12,474

○터널상단 녹지대 식재계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
터널상단녹지대	소나무(장송)	H10.0xR45	주	-	8	8	신규 (반영)
	소나무(장송)	H9.0xR40	주	-	8	8
	소나무(장송)	H9.0xR35	주	-	34	34
	소나무	H6.0xW3.0xR30	주	19	37	18	기존 (조정)
	소나무	H5.5xW2.5xR25	주	43	25	-18
	스트로브잣	H3.0xW1.5	주	15	-	-15
	매화나무	H2.5xR6	주	41	20	-21
	매화나무	H3.0xR8	주	-	26	26
	배롱나무	H3.0xR10	주	20	15	-5
	산벚나무	H3.5xB8	주	7	-	-7
	산수유	H3.0xR10	주	7	3	-4
	산딸나무	H3.0xR8	주	6	6	-
	산딸나무	H3.0xR12	주	-	53	53
	자작나무	H4.0xB10	주	32	-	-32
	청단풍	H3.5xR12	주	10	10	-
	청단풍	H2.5xR8	주	-	2	2
	왕벚나무	H3.5xB8	주	-	76	76	신규 (반영)
	대왕참나무	H4.0xR12	주	-	65	65
	회양목	H0.3xW0.3	주	4,500	2,050	-2,450	기존 (조정)
	낙상홍	H1.0xW0.4	주	500	1,450	950
	백철쭉	H0.3xW0.3	주	3,400	-	-3,400
	산철쭉	H0.3xW0.3	주	-	1,500	1,500	위치 (조정)
	수수꽃다리	H1.2xW0.4	주	7	20	13	기존 (조정)
	영산홍	H0.3xW0.3	주	3,650	2,050	-1,600
	황매화	H1.0xW0.4	주	550	1,250	700
	화살나무	H0.6xW0.3	주	-	7,160	7,160	위치 (조정)
	자산홍	H0.3xW0.3	주	-	8,280	8,280	신규(반영)
	병꽃나무	H1.0xW0.4	주	-	300	300
	구절초	8cm	본	600	10,100	9,500	위치 (조정)
	꽃범의꼬리	10cm	본	600	7,150	6,550
	돌단풍	10cm	본	4,750	4,750	-
	비비추	2-3분얼	본	1,200	1,200	-
	맥문동	3-5분얼	본	-	16,680	16,680	관급
	수호초	10cm	본	14,250	13,000	-1,250
	서양측백	H3.5xW1.5	주	-	75	75	차폐시설
	산수국	H0.3xW0.4	주	-	400	400	위치 (조정)
	조팝나무	H1.0xW0.5	주	-	600	600
	흰말채나무	H1.0xW0.4	주	-	400	400
	병꽃나무	H1.0xW0.4	주	-	900	900
	계			38,957	78,027	39,070

○ 감리단 의견

- 가로수 식재계획은 서초구 관내 가로수 식재 수종과 동일한 이팝         나무로 식재 계획하여 여름철 그늘목의 기능과 풍성한 흰색의 꽃          으로 보행자 및 운전자로 하여금 볼거리를 제공하고자함.

- 띠녹지구간은 서초대로의 간선도로 기능을 고려할 때 사철 푸른 초종과         계절별 개화하는 화목류를 식재 계획하고,

- 중앙분리대 구간은 사철 푸른 초종과 계절별 개화하는 초화류를 식재         계획하여 고품질의 녹지공간을 조성하고자함.

- 남천과 개쉬땅나무 등 미관이 수려한 수종을 식재하여 고품질의 녹지대를         조성하고자 함.

- 시점부 터널상단 녹지대의 경우 인근 주민의 요구 사항을 반영하여         장송을 4개 군락(50주) 식재 계획하였으며,

- 서초구청 요청에 따라 산벚나무를 왕벚나무로, 자작나무를 대왕참         나무로 수종 변경하였음.

- 종점부 터널상단 녹지대는 정자를 위치 변경하여 설치 계획하였으며,         전기실 차폐식재로 측백나무를 식재 계획하였음.

- 가로수와 도로녹지 및 터널상단 녹지대의 식재 및 시설물의 계획          변경과 공사비 산정은 적정하다고 판단되며

- 원활한 공정추진을 위해 우선 공사를 시행하고 변경되는 내용에          대하여는 향후 설계변경 하는 것이 타당하다 사료됨.

개략공사비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
조경공
식재공사
교목	262	654	392	소나무 외
관목	148	189	40
초화	29	73	44
기타	2	10	8	잔디
소계	442	926	484

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
시설공사
수목보호덮개	19	28	9
정자 및 등의자	11	-	-11
방초매트	-	2	2
맹암거	1	2	1
관수시설	13	-	-13
집수정 및 측구수로관	-	4	4
직접공사비	506	981	475
간접공사비	169	309	140
도급공사비	675	1,290	615
관급자재대	-	48	48
총 공사비	675	1,338	663

검토결과

○ 공사 시점부 터널 연장에 따른 터널상부 식재 면적 증가에 따라        조경 식재량 증가 및 민원사항 반영

▸ 장송식재 및 시설물 설치 지양 등 민원사항 반영

○ 시설물 유지관리 주체인 서초구청 요구사항 반영

▸ 가로수 은행나무, 느티나무 → 이팝나무 변경

▸ 띠녹지대는 가로정원 형태의 띠녹지로 업그레이드

※ 관목 변경 및 띠녹지대 주위 맥문동 식재

▸ 중앙분리대 차량주행에 지장 되지 않도록 퍼지는 수형(둥근소나무)            및 속성수를 지양하고 유지관리가 용이한 수종으로 식재하되 터널            입구이므로 관상가치 있는 수목식재, 주목은 관리가 용이한 수종으로            변경

▸ 상부조경은 토심확보 수형이 양호한 소나무 등 포인트식재로             업그레이드 요망 등

○ 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경         시 정산․반영할 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 통보         하고자 함.

붙임 : 실정보고 검토보고 1부.  끝.