투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(경관조명설비 보완설계 필요성에 대한 실정보고 승인 회신-월드컵대교 건설 전기공사)

1. 업무지시현장 : 월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차) 주식회사 포스코건설

2. 작 성 일 자 : 2019-04-04 17:04:30

3. 지 시 내 용

가. 문서번호 ㈜포스코건설 월드컵(감리) 2019-244호(2019.04.04.)와 관련입니다.

나. “월드컵대교 건설 전기공사” 와 관련하여 경관조명설비 보완설계 필요성에 대한         실정보고에 대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 보완설계 및 공사시행에 만전을         기하여 주시기 바랍니다.

- 보완설계 시행은 도급비에 포함하여 시행하고 추후 설계변경에 정산 반영

- 보완설계 소요금액을 빠른 시일내에 검토하여 제출.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 04/04 김은덕
협조자
시행			설비부-4850									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개