투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(케이블 덕트 및 케이블 트레이 사용자재 변경에 따른 실정보고 승인 회신-월드컵대교 건설 전기공사)

1. 업무지시현장 : 월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차) 주식회사 포스코건설

2. 작 성 일 자 : 2019-04-08 17:04:50

3. 지 시 내 용

가. 문서번호 월드컵(감리) 2019-247호(2019.04.04.)와 관련입니다.

나. “월드컵대교 건설 전기공사” 와 관련 케이블 덕트 및 케이블 트레이 사용자재          변경에 따른 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인 회신하오니 공사시행에 만전을         기하여 주시기 바랍니다.

- 승인내용

․ 교량하부의 케이블 덕트를 케이블 트레이로 변경 승인

․ 케이블 덕트 고정방법 변경 승인(케미컬앵커, 진동방지 크램프)

․ 아연합금도금 강판의 케이블 덕트로 변경 승인

- 기타사항 : 변경내용에 대해서는 추후 설계변경 및 준공도서에 반영.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 04/08 김은덕
협조자
시행			설비부-5029									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개