문서번호	도로보수과-3339
결재일자	2019.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	04/08 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사

작업지시 검토 보고(제1차)

2019.  4.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사』

작업지시 검토 보고(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2019.03.29. ~ 2019.12.31.

○ 시 공 사 : 다사랑건설 주식회사  대표 김용구

○ 도 급 비 : 362,884,000원

○ 공    종 : 과속방지턱 설치 4[eqn: m], 옹벽표면보수 579[eqn: m ^{2}], 사괴석보수 35[eqn: m ^{2}], 중앙분리대설치 38경간, 도로부속물 세척 15,773[eqn: m ^{2}] 등 기타

※ 응암로 중앙분리대설치 240경간, 충격흡수시설 설치 10개 등

□ 보고내용

○ 충격흡수시설 보수 : 2개소

- 원인불상의 충격흡수시설 파손으로 정비(연회로 외 1개소)

○ 중앙분리대 단부 보수 : 1개소

- 원인불상의 중앙분리대 단부 파손으로 보수(성산로)

○ 중앙분리대 2경간 철거 및 충격흡수시설 보수 : 1개소

- 도로보수과 현장순찰 결과 중앙분리대 및 충격흡수시설이 차량진행방향과 상이하여 조치 필요(성산로)

○ 보도용난간 보수 : 1개소

- 보도용난간 단부 파손 민원으로 정비(성산로)

○ 사괴석포장 보수 : 1개소

- 사괴석포장 파손 민원으로 정비(청계천로)

○ 구조물 세척(중앙분리대, 충격흡수시설 및 방음벽) : 5개소

- 봄맞이 도로시설물 청결대책과 관련하여 중앙분리대, 충격흡수시설 및 방음벽 세척 작업 시행(연희로 등 5개소)(약 11,014[eqn: m ^{2}])

○ 충격흡수시설 철거 : 1개소

- 은평경찰서 요청 사항 : 무단횡단으로 인한 사망사고 발생으로 기존 중앙분리대 연장 요청(진관공영차고지 앞)

※ 중앙분리대 연장 설치 : 15경간(45m)

- 규    격 : 정도산업 OSG-SB4-1/W3000×H900mm(기존 설치규격)

- 소요예산 : 약 5,000천원

- 추진계획 : 중앙분리대 15경간 조달 구매 후 현장설치

□ 조치계획

○ 우리시 봄맞이 도로시설물 청결대책과 관련하여 특별시도상 설치된 도로부속물이 겨울철 매연, 먼지 등으로 오염되어 도로환경을 저해하고 있는 실정으로 봄맞이 환경정비 일환으로 물세척을 실시하며,

○ 시설물 정비구간에 대하여 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비 (계약금액)	기 집행액	금회 집행액	집행잔액
도로부속시설물 일상유지보수공사 (연간단가)	362,884	-	129,670	233,214

○ 제1차 작업지시

- 건    명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사 작업지시(제1차)

- 작업위치 : 연희로 등 6개소

- 작업기간 : 2019.04.10. ~ 2019.05.15.

- 필요금액 : 129,670천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량

연번	노선명	공 종	규격	수량	단위	비고
1	연희로	구조물세척	형식별	2,377.5	㎡	청결대책
		충격흡수시설보수	기업은행(홍은동지점앞)	1.0		민원
		안전시설비		200.0	㎡	-
2	성산로	구조물세척	형식별	2,249.3	㎡	청결대책
		보도용난간보수	MJ-A-02	8.0	m	민원
		중앙분리대 철거		2.0	경간	도로순찰
		중앙분리대 단부레일보수	300*200*3.2t*1100	1.0	개소	도로순찰
		충격흡수시설보수	내부순환로 입구부근	1.0	개소	도로순찰
		안전시설비		200.0	㎡	-
3	마포대로	구조물세척	형식별	1,188.7	㎡	청결대책
		충격흡수시설보수	공덕역 중앙버스정류장 앞	1.0	개소	민원
		안전시설비		200.0	㎡	-
4	통일로	구조물세척	형식별	3,332.7	㎡	청결대책
		충격흡수시설 철거	진관공영차고지 앞	1.0	개소	유관기관 요청
		안전시설비		200.0	㎡	-
5	제설전진기지	구조물세척	형식별	1,866.0	㎡	청결대책
		안전시설비		200.0	㎡	-
6	청계천로	사괴석포장 보수	100×100×100mm	10.0	㎡	민원

□ 향후계획

○ 2019. 04. 10 : 작업지시 및 공사 시행

○ 2018. 05. 22 : 작업완료 및 결과 보고

붙 임 : 1. 제1차 작업지시 내역서 1부.

2. 제1차 작업지시 위치도 및 현황사진 1부.

3. 은평경찰서 요청공문 2부.

4. 2019년 새봄맞이 대청소 시행에 따른 협조 요청 1부.  끝.