＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2018년 청룡동외 9개동 상수도공사-제2회)-수정

우리사업소에서 시행중인 『2018년 청룡동외 9개동 상수도공사』에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속단가)

나. 계 약 자 : 이지건설(주)  대표자 박재호

다. 공사기간 : 2018. 6. 19. ~ 2019. 6. 30

라. 공사개요 : D=15~300mm, L=1,473m

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총부기금액	***********	***********	****
2차수금액	***********	***********	****

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증,감

사. 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용,급수공사비,신설공사비

자본적지출,유형취득자산,구축물,시설비 및 부대비,시설비[노후상수도관(배급수관)정비]

붙임 1. 설계변경 시행문 1부.

2. 설계변경 심의결과보고 및 심의의결서 각 1부.

3. 설계변경 검토보고서 1부.

4. 설계변경 변경내역서 1부.

5. 설계변경 합의서 1부

6 설계변경 사유서 1부.

7. 계약검증조정 확인서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	서동민		급수설비팀장	서규석		급수운영과장	04/08 이성환
협조자
시행	급수운영과-6758	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소	/
전화	02-3146-4578	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(5)