문서번호	설비부-4990
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	여인웅	04/08 임정규

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제2회) 검토 보고

2019. 04.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제2회) 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 통신공사」의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(제2회)에 대해 아래와 같이 검토 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

㈜삼우공간 제2019-205호(2019.04.02.), 물가변동으로 인한 계약금액       조정(제2회) 보고서 검토 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

공사위치 : 서울특별시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

공사기간 : (총차) 2017. 11. 03. ~ 2019. 07. 31.

(2차) 2019. 01. 08. ~ 2019. 07. 31.

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 옥외통신공사 1식, 통합배선공사 1식 CCTV 설치공사 1식 등

도 급 비 : (총차) 493백만원, (2차) 489백만원

Ⅲ		검토내용

물가변동 계약금액(ESC) 조정현황

구분 횟수	제 1 회	제2회	비고
조 정 방 법	지 수 조 정	지 수 조 정
조정 기준일	2018.08.31.	2018.11.30.
조 정 률	3.06%	3.08%
조 정 금 액	15,043,000원	15,459,000원

물가변동 계약금액(ESC) 조정(제2회) 내용

물가변동 조정률 [A]	3.08%	물가변동 경과기간	90일	기준시점(직전조정일) : 2018.08.31.
				비교시점(조정기준일) : 2018.11.30.
물가변동 대상공사의 계약금액 [B]		507,753,120원		물가변동 조정기준일 현재의 공정률	예정공정률	0.65%
					실행공정률	0.65%
물가변동 적용제외 계약금액 [C]		5,824,537원		물가변동 적용대가 [D] = [B - C]	501,928,583원
선금급 공제금액 [F]		해당 없음		물가변동 등락대상 조정금액 [G] = [A × D]	15,459,000원
경유세 공제금액 [H]		해당 없음		물가변동 조정 적용금액 [I] = [G – F - H]	15,459,000원

감리단 검토의견

□ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 통신공사」와 관련하여 검토한 결과 직전기준일(기준시점)로부터 물가변동 경과기간(90일), 지수조정률(3.08%)등이 적정하게 산출되어 물가변동으로 인한 계약금액 설계변경이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		조치의견

책임건설사업관리기술자가 검토한 통신공사의 물가변동으로 인한 계약금액(ESC) 조정(제2회)에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 통보하고자 하며 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  검토 보고서(감리단) 1부.  끝.