문서번호	시설과-3636
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정성오		송병욱	04/09 이규상
협 조
	주무관			최이영

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉배수지 건설공사」

배수지 자재반입구 관련 실정보고

2019. 4.

상수도사업본부

(시 설 과)

「국사봉배수지 건설공사」

배수지 자재반입구 관련 실정보고

국사봉배수지 건설공사 관련 배수지 자재반입구 실정보고에 대한 검토사항을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 12,000㎥, 송배수관 D=200~1000㎜, L=3.4㎞

○ 공사기간 : 2016. 12. 1.~2019. 7.17.

○ 도 급 비 : 9,467백만원(3차 : 4,445백만원, 4차 : 1,329백만원)

○ 시 공 사 : 청광종합건설(주)  대표 허승

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사  대표 이우정

□ 보고요지

○ 배수지 임시 자재반입구 설치 수량 반영

- 배수지 내부공사에 필요한 주요 자재 반입·반출을 위하여 설치한 임시 자재반입구 사용완료 후 슬래브 마감하기 위한 물량 반영

▹ 시공물량 : 철근가공 및 조립 2.323ton, 철근기계적이음(D22) 368ea, 철근기계적이음(D25) 112ea

○ 공사비 증·감 : (증)6,810천원

□ 실정보고 검토 내용

○ 배수지 내부공사를 고려한 임시 자재반입구 사용완료 후 슬래브 마감을 위한 철근배근시에 기계적이음 등의 물량 반영

- 철근커플러 설치비는 철근가공 및 조립비에 포함되어 있으므로 자재비만 적용

※ 자재반입구 규격 H=0.6m, B=3.4m×2.8m, N=4

	＜자재 반입구 현황＞
<배수지 길이 방향>		<배수지 폭 방향>

○ 변경물량 및 공사비 대비표

공 종 명	단위	당 초		변 경		증·감		비고
		수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
합 계			1,250,000		8,060,000		6,810,000
1.직접공사비			738,827		5,813,931		5,075,104
철근가공및조립	TON			2.323	1,371,403	2.323	1,371,403
철근조립	TON	2.323	738,827			-2.323	-738,827
철근기계적이음(D22)	EA			368	3,335,184	368	3,335,184	신규
철근기계적이음(D25)	EA			112	1,107,344	112	1,107,344	신규
2. 제잡비			511,173		2,246,069		1,734,896

□ 건설사업관리 기술자 검토내용

○ 배수지 임시 자재반입구 반영건은 배수지 내부공사를 고려하여 설계반영함이 타당하며,

○ 상기의 누락사항에 대한 실정보고는 지방자치단체 공사계약 일반조건  “6(공사 설계의 변경)-1(설계변경)-가”에 해당되는 설계변경 사항으로,

○ 실정보고서 검토내용과 같이 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여 설계변경 시 반영함이 타당하다 판단됨.

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사 설계의 변경)-1(설계변경)-가”의 규정

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

□ 조치의견

○ 배수지 내부공사를 고려한 배수지 임시 자재반입구 설치는 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며,

○ 공종별 건당 3천만원 이하로 자체 계약금액조정 심사 소위원회(시설과) 검토 결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙 임 : 현장실정보고[대한(국사관리단) 제2019-035(’19. 3.28.)호] 1부.  끝.